투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(1차) 시행 (2015년 교량 및 고가 일상유지보수공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2015년 교량 및 고가 일상유지보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 교량 및 고가 일상유지보수공사

나. 도 급 자 : 웅원건설(주) 대표 한상철

다. 공사기간 : 2015. 04. 01 ~  12. 31

라. 계약금액 : 금734,492,480원

마. 설계변경사유 : 시공물량 증 ․ 감, 신규 공종 발생,  관급비 감에 따른                                      설계변경

바. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비		1,020,492,480	1,020,492,480	-
도급비	계	734,492,480	807,510,480	증)73,018,000
	공급가액	667,720,437	734,100,437	증)66,380,000
	부가가치세	66,772,043	73,410,043	증)6,638,000
관급비		224,000,000	150,982,000	감)73,018,000
이전비		62,000,000	62,000,000	-

사. 예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 도로시설물(교량)일상유지보수, 시설비및부대비, 시설비.

별 첨 : 1) 설계변경 검토보고서 1부.

2) 합의각서(시공사) 1부.  끝.

주무관	임승민		시설보수과장	박춘배		성동도로사업소장	09/21 이종엽
협조자	계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-3363	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동)	/
전화	02-2210-1558	/전송	02-2210-1549	/		/	부분공개(5)