문서번호	시설관리과-20171
결재일자	2015.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
정수용	김근용	09/22 이자원
협 조

『등촌동 640~82-1번지외 1개소 간선배관 부설공사』

설계변경 심의위원회 개최결과 - 1차

2015. 9.

시설관리과

『등촌동 640~82-1번지외 1개소 간선배관 부설공사』

설계변경 심의위원회 개최결과 - 1차

우리사업소에서 시행중인  「등촌동 640~82-1번지외 1개소 간선배관 부설공사」에 대한 설계변경(1차) 심의위원회 개최 결과를 보고드림.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 등촌동 640~82-1번지외 1개소 간선배관 부설공사

나. 공사개요 : D=150~600㎜, L=720m

다. 공사기간 : 2015. 04. 21 ~ 2015. 10. 17.

라. 계약금액 : 금158,377,590원

마. 도 급 자 : 하송종합건설(주)  대표 장범식(현장대리인 : 조필홍)

바. 감 리 자 : ㈜이준엔지니어링 이방열(관리기술자: 김동건)

2. 심의일시 : 2015. 9. 21(월) 17:00(강서수도사업소 4층 회의실)

3. 설계변경 현황

가. 도급비 변경내역(변동없음)

(단위 : 원)

구 분	당초	변경	비 고 (증 ․ 감)
총공사비	397,987,590	397,987,590	변동없음
도 급 비	158,377,590	158,377,590
관급자재비	158,610,000	158,610,000
도로복구비 및 기타	81,000,000	81,000,000

나. 설계변경사유

- 신규공종 발생 따른 설계변경 시행(9건)

▶ 신규공종 : 플랜지접합공 100mm외 7개 공종(낙찰율 적용)

▶ 사급자재 : 이형관(에폭시분체)

- 기타 물량 증ㆍ감에 따른 변경(81건)

▶ 물량 증가(34개) : 토사절취 외 33개 공종

▶ 물량 감소(47개) : 주철직관 부설공(150mm) 외 46개 공종

※ 시방서 및 특별시방서：변경사항 없음

나. 주요공종 물량변경 내역

공 종	규 격	단 위	당초수량	변경수량	증ㆍ감
아스팔트 포장절단	100~150mm 적용	㎥	562	501	감)61
주철직관 부설공	150mm	m	542	518	감)24
주철(이형관) 부설공	150mm	개소	37	28	감)9
kp이탈방지압륜 접합	600mm	개소	41	32	감)9

4. 심의 주요내용

가. 설계변경의 타당성

나. 신규공종에 대한 단가적용 적정여부

다. 공종별 물량 증･감 적용 적정여부

라. 제경비 적정산정 및 적용 적정성

마. 계약금액 조정 등

5. 설계변경 심의결과

가. 설계변경 : 타당

나. 신규종종 단가적용 : 적정

다. 주요 공종 물량 증･감 사항 : 타당

라. 제경비 산정 적용 : 적정

마. 계약금액 조정 : 타당

6. 조치계획

- 심의결과에 따른 설계변경 시행 및 본청 재무과에 변경계약 의뢰

따로붙임 : 1) 설계변경 계획서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 설계변경 심의결과서 1부.  끝.