문서번호	공간정보담당관-120
결재일자	2014.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보개발팀장	공간정보담당관
박지선		김태준	01/06 조봉연
협조
	주무관		강점순

「2013년 통합공간정보시스템(SDW) 기능개선 사업」 주간(12월5주) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
공간정보 담당관-1207				155,000천원

2014. 1.

□2013년 통합공간정보시스템(SDW) 기능개선 사업□

주간업무(12월 5주) 보고

-  -

사업명			2013년 통합공간정보시스템(SDW) 기능개선 사업
사업기간			`13.6.5~`14.2.3	서울시담당		공간정보담당관 박지선 주무관
사업비			155,000천원	업체/PM		㈜지노시스템 박상남
보고기간			‘13.12.27 ~ ’14.1.2	전체공정율		계획 92.2% / 실시 90.0%
주요내용			1. SDW 통합관리시스템 개발 2. 행정분석데이터 갱신 프로그램 개발 3. 미래유산 주제도 공간화 작업
주간 업무 보고
Part	금주 실적 (2013.12.27 ~ 2014.01.02)				차주 계획 (2014.01.03 ~ 2014.01.09 )
공간데이터 수집기능 개선	○ SDW 통합관리시스템 개발 - 단위 프로그램 입력/수정 기능 개발 - 단위 프로그램 파라메터 설정 기능 개발 ○ SDW 클라이언트 프로그램 개발 - 콘솔(Console) 실행 기능 개발				○ SDW 통합관리시스템 개발 - 단위 프로그램 정보관리 기능 개발 ○ SDW 클라이언트 프로그램 개발 - 테스트 (상수도 본부)
행정정보 분석데이터 활용기능 개선	○ 행정분석데이터 갱신 프로그램 개발 - 오류 보완				○ 행정분석데이터 갱신 프로그램 개발 - 설치 프로그램 개발
행정 주제도 추가 구축	○ 미래유산 주제도 구축 - 지번기반 공간화 작업 진행중 - 지번 미매칭 건 재확인 작업 진행중(140건)				○ 미래유산 주제도 구축 - 주소 구축 작업 확인 및 오류 수정 ○ 음식점 인증업소 데이터 수급 대기
통합공간 정보시스템 관련 지원 및 기타	○ 1월 갱신 - 자료 수집 ○ 권한설정 - 마포구 담당자 브라우저 설정변경				○ 1월 갱신 - 자료 수급 및 좌표변환
산출물/별첨자료	○ 주간보고서 1부.
협조사항
對 서울시
對 용역업체
기타