문서번호	기전과-9572
결재일자	2015.9.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	북부도로사업소장
강운규	이영목	09/22 노영석

「2015년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사」

설 계 변 경 계 획 보 고 (3차)

2015. 9

북부도로사업소

기전과

「2015년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사」

설 계 변 경 계 획 보 고 (3차)

도로를 이용하는 시민에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성코자 추진하고 있는 교통안전표지 공사에 대해 유지보수를 위한 공사비 부족이 예상되어 품의가능한 집행잔액 예산을 활용하여 추가 공사비를 확보하고자 보고함.

관련근거

2015. 2. 16 교통분야(교통안전표지) 공사추진계획보고

2015. 3. 30 교통안전시설(교통안전표지) 유지보수공사 계약 및 착공

2015. 9. 11 2015년 출납폐쇄기한 단축에 따른 예산 집행철저

※ 품의가능(낙찰차액 포함) 전액 집행 사업추진 지시

2015. 9. 14 교통안전표지 유지보수공사 12차작업진행중, 13차작업대상조사

사업개요

구 분	사 업 개 요	비 고
공 사 명	2015년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)
공사기간	2015.3.30. ~ 2015.12.31.
공사내용	- 교통안전표지 유지보수, 서울경찰청교통규제처리 - 경찰서 개선사항 처리, 각종 민원처리 등
도급업체	***********
도 급 비	금57,726,390원
공 정 률	81%
감리업체 (시공감리)	(주)영호이앤씨 대표 정숙영 (교통운영과 발주)

예산계약현황

(단위 : 원)

구 분	예산배정액	사업금액	계약금액	품의가능예산 (집행잔액)	비 고
총 액	92,000,000	92,000,000	57,726,390	9,489,210
도 급 비		65,000,000	57,726,390	7,273,610
관 급 비		27,000,000		2,215,600

설계변경 금액

구 분	변경 전	변경 후	증 감		비 고
총 공 사 비	57,726,390	62,000,000	4,273,610	증
공 급 가 액	52,478,536	56,363,636	3,885,100	증
부가가치세	5,247,854	5,636,364	388,510	증

집행잔액 사용 필요성

집행잔액 : 총7.273,610원

사용 필요성

서울지방경찰청 교통안전시설물 개선요청 - 16개소(작업수량20매)

- 교통안전시설물 개선설치 통보(하달) (교통관리과-24142,24028)

- 교통안전시설 설치공사 실시설계 완료내역 통보 (교통운영과-18083)

노후된 교통안전표지 정비요청에 따른 작업이 경찰청의 교통규제 심의사항과 더불어 추진되고 있으나 교통안전표지 개선요청이 많아서 공사비가 부족한 실정임.

보고자 검토의견

현재 교통안전표지 유지보수공사의 도급비 및 관급비 잔액이 얼마남지 않은 상태로 금번 추가배정액 720만원 중 도급비(420만원)와 관급비(300만원)로 품의 후 노후 시설물 보수 및 긴급 민원발생시 신속한 민원처리를 위하여 집행잔액 예산을 활용하여 사업을 최대한 추진하고 설계변경 정산코자 합니다.

붙임 : 관련 공문(교통운영과) 1부. 끝.