함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사실정보고 검토 회신

1. 공사감독2처-15081(2015.09.21.)호와 관련입니다.

**************************************************************************************************************

**********

***

검토요청사항	사업소 검토결과	비 고
1.유량계실 설치를 위한 확인굴착3개소 및 유량계 전력관,통신선 등은 통합밸브실에서 D500mm부설된 선형 따라 매설(H=0.6m) 하고 신규대가는 시공사와 낙찰률과 설계단가의 평균인 93.873%적용하기로 협의	신규단가는 시공사와 협의한 평균단가인 93.873%를 적용하여 정확한 물량을 산정하여 설계변경시 반영할 것
2.분기 지점 및 전기,통신 하월구간 등 지장물관계로 확폭실시	2.확폭으로 증가된 토공량을 정확하게 산정하여 설계변경 시 반영할 것

********

	동부수도사업소장
★주무관	권영안		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	09/22 최명익
협조자
시행	급수운영과-25135	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2742	/전송	02-3146-2789	/	kwon1901@seoul.go.kr	/	부분공개(6)