문서번호	시설관리과-22969
결재일자	2015.9.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
구본천		09/22 우종근
협조
	주무관		최희권

설계변경 심의결과 및 변경 시행 보고

(영등포여고외 3개소 학교급수시설 개선공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09.

명에 의거「영등포여고외 3개소 학교급수시설 개선공사」에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의결과에 의거 아래와 같이 설계변경 시행하고자 보고합니다.

2015. 09.   .

보고자: 지방시설주사보 구본천

□ 심의대상

◦ 공 사 명 : 영등포여고외 3개소 학교급수시설 개선공사

◦ 공사내용 : D=15㎜, L=220m, 음수대 42개소 설치

◦ 계약기간 : 2015. 7. 14. ~ 2015. 10. 13.

◦ 수 급 자 : (주)홍익설비  대표 강오영

◦ 도 급 비 : 23,467,000원(감액2,142,720원)

□ 심의일시 및 장소

◦ 2015. 09. 22(화)  2층 사무실

□ 심의내용

◦ 설계변경의 타당성

◦ 신규공종 단가 및 계약물량 증․감 적용 적정여부

- 물량증감 : 컨트롤판넬 설치 등 2개 공종

◦ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성

◦ 부대공 적정 산정 검토

◦ 계약금액 조정 (설계변경) 등.

□ 심의결과

◦ 계약변경 타당

◦ 주요 공종 변경사항 타당

◦ 세부공종 조정내역 타당

◦ 제경비 적용 타당

□ 설계변경

◦ 위 공사 시행중 현장여건 변화에 따라 신규공종 및 계약물량 증․감 발생

- 물량증감 : 컨트롤판넬 설치 등 2개 공종

□ 설계변경 및 차수별 계약금액 변경

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
총 부기금액	25,609,720원	23,467,000원	감2,142,720

□ 조치의견

◦ 심사결과에 의거 설계변경 시행코자 하며 공사준공에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 사전심의 요청서 및 의결서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.