투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(분뇨 유입저류조 증설공사) 시행(최종정산)

1. 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-15124(’15.9.21)호 “설계변경 보고서 제출(정산)”과 관련입니다.

2. 분뇨 유입저류조 증설공사 시행과 관련 아래와 같은 사유로 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 사 유 : 공사완료에 따른 2차 설계변경 이후의 변경사항 반영

나. 주요 내용

- 제수변 설치 : 슬러지재활용과-3735(2015.05.21)승인

- 시스템동바리 : 슬러지재활용과-3735(2015.05.21)승인

- 철근겹이음 및 누락 : 슬러지재활용과-4320(2015.06.09)승인

- 출입구, 점검구변경 : 슬러지재활용과-6038(2015.08.06)승인

- 되메우기다짐 : 슬러지재활용과-6038(2015.08.06)승인

- 가적치장운영 : 슬러지재활용과-6038(2015.08.06)승인

- 부대공 수량증감 : 슬러지재활용과-6963(2015.09.07)승인

다. 변경내역

구 분		최 초	1차(‘14.12.26)	2차(‘15.5.22)	최종
총 공 사 비		*************	*************	*************	*************
도급액	공급가액	*************	*************	*************	*************
	부 가 세	***********	***********	***********	***********
	계	*************	*************	*************	*************
관급자재		***********	***********	***********	***********
이 설 비			***********	***********	**********

주)1. 1차변경시 사고이월에 의한 예산확보를 위해 이설비를 계약금액에 포함(계약           금액=도급액+이설비)

2. 본 변경계약은 최종 정산에 의한 도급액으로 계약

라. 계약금액 변경

****************************************

****************************************

마. 계약업체 : ㈜보훈종합건설 외 1

첨부 : 설계변경 관련서류 각 1부.

지방환경사무관대우	하병문		슬러지재활용과장	이동신		중랑물재생센터소장	09/22 김동기
협조자
시행	슬러지재활용과-7417	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	부분공개