문서번호	기반시설과-1019
결재일자	2015.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
권혁제		한흥태	09/22 박상돈
협 조
	총무과장			최대봉
	기획예산과장			박병현
	주무관			박중모

- ‘15년 한강공원 야외수영장 보수공사 -

설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  9.  .

한강사업본부 시설부

[기반시설과]

-‘15년 한강공원 야외수영장 보수공사 -

설계변경(정산) 검토 보고

공사시행 중 물량 증･감에 따른 설계변경 보고에 대한 검토내용 및 조치계획을 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 :‘15년 한강공원 야외수영장 보수공사

공사내용 : 수조도장 24,000㎡, 타일설치 3,192㎡ 등

공사기간 : 2015. 3. 16. ～ 2015. 10. 1.

시 공 사 : 주식회사 평광건설

도 급 비 : 1,607,638천원

위탁감독 : 시설관리공단 공사감독 1처

Ⅱ		변경사유 및 검토내용

근    거 : 시설관리공단 공사감독1처-8624호(2015.09.18.)

변경사유

□ 현장 실정보고 및 검토결과 통보에 따른 물량 증가.

▹ 실정보고 (설계 변경사항) 검토결과 통보 2회.

- 기전설비2과-1272호(2015.05.07), 기반시설과-753호 (2015.09.01)

▹ 설계변경 주요내용

- 뚝섬 성인풀 벽체 화강판석 탈락 보수 및 판석상부 안전난간 철거후 재설치.

- 뚝섬 샤워장 및 탈의실 바닥 화강판석 포장 (운영부서 요청)

- 여의도 바닥재 도포구간 바닥콘크리트 균열 보수등

- 수영장 운영중 보수물량 증가에 따른 작업인원 정산.

- 뚝섬 판석보수 및 판석포장에 따른 폐기물량 증가.

□ 변경사항에 대한 검토

구 분	변 경 사 항	검 토 내 용
1차	∘ 운영부서 합동점검 시 요구사항 작업지시 - 뚝섬 성인풀 벽체 화강판석 탈락부 보수 - 뚝섬 사워장 및 탈의실 바닥 화강판석 포장 - 여의도 바닥재도포구간 콘크리트 균열 보수	∘ 기전설비2과-1272호(15.05.07)로 검토결과 기 통보
2차	∘ 수영장 운영중 보수물량 증가에 따른 작업인원 정산 - 보도 평탄화 작업 및 6개수영장 그늘막 청소 등 64건	∘ 기반시설과-756호(15.09.01)로 검토결과 기 통보
금회	∘ 보험료 등 제경비 및 폐기물처리용역 정산 - 미집행 보험료 등 제경비 정산 - 폐기물량 증가에 따른 처리물량 정산	∘ 미집행 보험료 및 제경비와 증가된 폐기물량 정산으로 적절함

□ 증 ․ 감 내역

▹ 공사비

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	공급가액	1,461,489,091	1,514,390,000	52,900,909	※ 추가 지출품의 가능액 105백만원
	부 가 세	146,148,909	151,439,000	5,290,091
	계	1,607,638,000	1,665,829,000	58,191,000

▹ 폐기물처리 용역비

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
용 역 비	5,634,000	6,260,000	626,000

▹ 총 사업비(수영장 유지관리 토목분야 : 2,164백만원) 범위 내로 공사비 및 폐기물처리용역의 물량변경에 따른 증액사항 반영하여 설계변경 시행.

Ⅲ		검토의견 및 조치 계획

검토의견

□ 시설관리공단으로부터 제출된 설계변경 내용은 기 검토 및 승인 통보된

사항으로,

□ 추가 작업지시로 증가된 물량에 대한 설계변경은 적정한 것으로 판단됨.

조치계획

□ 시설관리공단의 설계변경 보고 건 승인통보 및 계약관리부서에 변경계약을 요청하고자 함.

첨 부 : 1. 시설관리공단 공사감독 1처-8624호 1부

2. 추가작업 전‧후사진 1부.   끝.