함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계 변경 심의위원회 개최 결과보고(2014년 도봉구관내 급수공사)-2차,최종

1. 우리 사업소에서 시행중에 있는 “2014년 도봉구관내 급수공사(단가계약)”에 대하여 신규공종 및 물량 증.감 발생으로 인한 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고합니다.

가. 일반현황

○ 공 사 명 : 2014년 도봉구관내 급수공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요   ․ 당초 : D = 13~300mm, L = 1,989m   ․ 변경 : D = 13~300mm, L = 2,074m

○ 공사기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 6. 30 (총부기기간 : 2014. 6. 10 ~ 2015. 6. 30)

○ 도 급 비                                                                  (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증,감
총 부기금액	575,409,560	574,687,000	감) 722,560
1차 부기금액	437,702,000	437,702,000	-
2차 부기금액	137,707,560	136,985,000	감) 722,560

○ 시 공 사 : 호용종합건설(주)  대표 김익관

나. 심의회 개최

○ 심의 일정  : 2015. 6. 23.(화)  10:00

○ 심의 장소  : 급수운영과

○ 심의위원장 : 급수운영과장

○ 심의 위원  : 시설7급 강대유, 시설7급 김종필, 시설7급 유광창, 시설7급 이한수

다. 심의내용

○ 설계변경의 타당성               ○ 제경비 적정산정 및 적정적용

○ 부대공 및 신규공종 적정산정      ○ 기타 제반규정 적정 준수여부 등.

첨 부 : 1). 설계변경 사유서 및 심의 결과서 1부.

2). 설계변경 내역서 등 1부. 끝.

주무관							윤승구				주무관					최용진					급수운영과장					06/23 김수영
협조자				주무관							이한수					주무관							유광창					주무관								김종필토
주무관							강대유
시행			급수운영과-11446										(						)		접수												(						)
우	142-062					서울 강북구 한천로 935 377																/
전화		02-3146-3343							/전송			02-3146-3389					/	yseong9@seoul.go.kr													/	부분공개