기성부분검사(감독) 조서(갑)[하남선 1-2공구 건설사업관리용역(1차 1회)]

문서번호	도시철도토목부-12171
수 신 자	건설총괄부장
접수번호

결재	주무관		토목1과장		도시철도토목부장
		장대성		김성호		09/23 김진팔
협조

공 사 명	하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사 건설사업관리용역(1차)
계 약 자	(주)대한콘설탄트 대표 이 우 정
계약금액	금330,000,000원				기성부분 준공금액		금155,500,000원
계약일자	2015년 03 월 06 일				착공일자		2015년 03 월 13 일
준공기한	2015년 11 월 12 일				부분기성 일 자		2015년 03월 13일 ~ 2015년 09월 12일
기성검사일자	2015년 09 월 21 일
참고사항	- 전회까지 기성금액 : ￦ 0원(기성율 %) - 금회 기성금액 : ￦155,500,000원(기성율 52.88%) - 누계 기성금액 : ￦155,500,000원(기성율 52.88%)
위 공사(용역)에 대한 감독 및 기성검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 완료되었기에 본 조서를 제출함.
2015 년 09 월 21일
현장감독공무원		도시철도토목	부	지방시설주사		직		성명	김 현 근		김현근
검 사 자		도시철도토목	부	지방시설주사		직		성명	정 성 환		정성환
검 사 자		도시철도토목	부	지방시설주사		직		성명	정 삼 기		정삼기
서울특별시 도시기반시설본부(분임)경리관 귀하

기성검사 내역서(1차 1회)

1. 용 역 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사 건설사업관리용역(1차)

2. 계 약 자 : ㈜대한콘설탄트    대표이사  이 우 정

3. 계약금액 : 一金 삼억삼천만원정(금330,000,000원)

4. 기성금액

○ 전회까지 기성 : 금          0원

○ 금 회 기 성 : 금155,500,000원

○ 누 계 기 성 : 금155,500,000원

4. 내 역 서

기간 : 2015.03.13 ~ 2015.09.13  (단위 : 원)

공 종	수량	단위	계약금액	기 성 금 액			비고 (기성고)
				전 회 기성금액	금 회 기성금액	누 계
1. 건설사업관리용역	1	식	296,690,910	-	139,804,547	139,804,547
2. 손해배상보험료	1	식	3,640,000	-	1,715,000	1,715,000
3. 부가가치세	1	식	29,669,090	-	13,980,453	13,980,453
총 용 역 비			330,000,000	-	155,500,000	155,500,000

. 끝.