문서번호	정수과-4622
결재일자	2015.9.23.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유동구		이태일	09/23 代정남기
협 조

「배출수처리시설 운영관리용역」

3차년도분 보험료정산에 따른 변경계약 실시

2015. 9.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

『배출수처리시설 운영관리용역』

3차년도분 보험료정산에 따른 변경계약 실시

구의아리수정수센터 배출수처리시설 운영관리용역에 대한 3차년도분 보험료 정산을 실시하고 이에 따른 설계변경을 시행하고자 보고드림.

보험료 정산 개요

근   거 : 행정안전부 예규 제404호 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」

대상 보험료 : 건강보험, 국민연금, 장기요양보험

정산 방법 : 설계 내역서의 보험료에서 실제 납입금액을 확인하여 그 차액분을               감액 정산함

계약 현황

건   명 : 배출수처리시설 운영관리용역(구의아리수정수센터)

계 약 자 : ㈜예스코이에스 대표 김상헌

용역기간 및 금액

구 분	용 역 기 한	계약금액(원)	비 고
1차년도	2013.10.01 ～ 2013.12.31	36,363,000	정산 완료
2차년도	2014.01.01 ～ 2014.12.31	167,934,000	정산 완료
3차년도	2015.01.01 ～ 2015.09.30	144,297,000	정산 대상
총차계약	2013.10.01. ～ 2015.09.30	348,594,000

변경계약 내역

계약현황	당 초	변 경	비 고
1차년도	36,363,000	36,363,000	변동없음
2차년도	167,934,000	167,934,000	변동없음
3차년도	144,297,000	142,165,000	감(2,132,000)
총차계약	348,594,000	346,462,000	감(2,132,000)

보고의견

배출수 처리시설 운영관리용역 3차년도 용역금액을 보험료 정산분만큼 감액하여   재무과에 변경계약을 의뢰하고자 합니다.

붙임 1. 3차년도 보험료 정산내역 1부.

2. 증빙서류 각 1부.  끝.