투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	시설관리과장
(경유)
제목	변경계약체결통보 - 2015년 한강공원 자전거도로 유지보수공사 외 1건 건설폐기물 처리 용역

1. 시설관리과-2843(2015.09.18.)호 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 아래와 같이 계약이 체결되었음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

계 약 현 황	용 역 명	2015년 한강공원 자전거도로 유지보수공사 외 1건 건설폐기물 처리 용역
	계약상대자	동부이엔티 주식회사 (대표 : 허진원)
	계 약 일 자	2014.04.24
변 경 내 역	내 용	계약금액 변경 (감 18,542,510원), 계약기간 변경 없음
	변경사유	현장여건에 따른 폐기물 증감사항 반영
기 간 변 경	변경전 착수일자	2015.04.24	변경후 착수일자	2015.04.24
	변경전 완수일자	2015.12.20	변경후 완수일자	2015.12.20
금 액 변 경	변 경 전	86,842,510 원
	변경금액	(감) 18,542,510 원
	변 경 후	68,300,000 원

붙    임 :  변경계약체결통보서 1부. 끝.

	총무부장
주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	09/23 이상국
협조자
시행	총무과-16177	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개