투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(도로계획과장)
(경유)
제 목	예산 조정 요청(율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사)

우리본부에서 시행중인『율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사』의 용문학원외 5개소 토지 및 지장물 손실보상에 필요한 예산이 부족할 것으로 판단되어 2015년도 공사비 예산을  보상비로 조정 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

-   아     래   -

1. 공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사

2. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분		2015년 예산			비 고
		당 초	변 경	증·감
시설비		7,000 (731)	7,000 (731)	- (-)	( )사고이월 금액
1,보상비		1,500 (443)	2,188 (443)	증)688 (-)
2. 공사비	소 계	5,000 (288)	4,312 (288)	감)688 (-)
	도 급	3,800	3,474	감)326	326백만원을 보상비로 변경
	관급자재비	402 (59)	402 (59)	-
	전 기	578 (229)	216 (229)	감)362	362백만원 보상비로 변경
	폐기물	220	220	-
3.감리비		500	500	-

3. 손실보상 시기 : 2015.11.~12.

4. 예산과목 : 교통사업특별회계, 도시안전실도로계획과, 도로건설,
간선도로망확충, 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사, 시설비및부대비

붙임 : 방침서 사본 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박상철		광역도로과장	진재섭		토목부장	09/23 노우성
협조자
시행	토목부-20048	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	scpark555@seoul.go.kr	/	대시민공개