문서번호	시설과-5833
결재일자	2015.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설과장	관리부장
이강호	공헌구	09/23 심상원
협 조
	주무관		오창호
	주무관		이상국

서울대공원 주 보일러실 굴뚝 보수보강공사 공사기한 연기 검토 보고

2015.  9.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『서울대공원 주 보일러실 굴뚝 보수보강공사』

준공기한 연기검토 보고

명에 의거 「서울대공원 주 보일러실 굴뚝 보수보강공사」감독업무 수행중 준공기한 연기 사유가 발생하여 보고합니다.

Ⅰ		용 역 개 요

□ 공 사 명 : 서울대공원 주 보일러실 굴뚝 보수보강공사

□ 공사기간 : 2015. 7. 22 ~ 2015. 10. 4

□ 공사금액 : 금68,462,800원

□ 시 공 자 : 인본건설(주) 대표 길 기 상

Ⅱ		연 기 사 유

□ 시공자 준공기한 연기 요청(인본건설(주)제 68호, 15. 9. 23)

○ 사유 : 굴뚝내부에서 습기유출로 추가 보수공사 필요 함

Ⅲ		검 토 의 견

□ 추가 공사를 위해 준공기한을 연기하는 것이 타당함

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 준공기한 연기

구 분	변 경 사 항		비 고
	당 초	변 경 후
준공기한	‘15.07.22 ~ ’15.10.04	‘15.07.22 ~ ’15.10.19	15일간

Ⅳ		조 치 의 견

□ 원할한 공사진행을 위해 상기와 같이 준공기한을 연기코자 함.

붙임 : 현황사진. 끝.