문서번호	기전과-6658
결재일자	2015.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
차준원	09/23 최주용

『2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가 1,2구역)』

감리원 작업기간 변경요청 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.09

성동도로사업소

(기 전 과)

『2014년 교통신호기 설치 및 보수공사(연-1,2구역)』

감리원 작업기한 변경요청 검토 보고

2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가-1,2구역)관련 감리원의 작업기간 변경 요청이 있어 검토 후 그 결과를 보고 드림

관련근거

○대영전기감15A-09-24호(2015.09.22) : 1,2구역 제2차 작업지시 작업기간 변경요청(2회)

○대영전기감15A-09-25호(2015.09.22) : 1구역 제3차 작업지시 작업기간 변경요청(2회)

공사개요

구분	1구역	2구역
공 사 명	2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가-1구역)	2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가-2구역)
도 급 자	영진전기소방설비공사	대현전력(주)
도 급 비	259,581,880원	254,693,570원
공사기간	2015.03.13 ~ 2015.12.31	2015.03.10 ~ 2015.12.31
감 리 원	대영유비텍(주) 책임감리원 강광환

작업기간 변경요청 기간

연번	지역	작업지시	변경전 기간	변경후 작업기간
1	1, 2구역	2차 작업지시	2015.05.11 ~ 2015.09.30	2015.05.11 ~ 2015.10.30
2	1구역	3차 작업지시	2015.06.16 ~ 2015.09.30	2015.06.16 ~ 2015.10.30

작업기간 변경요청 검토 결과

구역	위치	현황 및 문제점	감리원 의견	검토결과
1,2구역 -2차	-신내우체국 -신내노인복지관 -봉화삼거리	공사시 통합지주 설치 추진계획(교통운영과)에 의거 업무 추진중 관할구청과 협의 지연	작업기간 변경 필요	-작업기한 변경이 타당하다 판단됨
1구역-3차	-면목보훈회관 -중화지구대 -혜성교회

조치의견

○ 공사실정 보고 및 공사기간 변경요청에 대한 감리원의 의견을 검토한      결과 보고 내용이 타당성이 있어 이를 현장 여건에 맞도록 변경하여       시공토록 감리자에게 지시하고자 합니다.

붙   임 : 1. 작업기간 변경요청 2부. 끝.