투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	「서울대공원 주 보일러실 굴뚝 보수보강 공사」준공기한 연기 의뢰

1. 시설과-5833호(2015. 9. 23)호와 관련입니다.

2.『서울대공원 주 보일러실 굴뚝 보수보강 공사』와 관련하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

가. 공 사 명 : 서울대공원 주 보일러실 굴뚝 보수보강 공사

나. 계 약 자 : 인본건설(주) 대표 길 기 상

다. 계약금액 : 일금육천팔백사십육만이천팔백원정(\68,462,800원)

라. 변경내용

구 분	변 경 내 용		비 고
	당 초	변 경
준공기한	‘15.07.22 ~‘15.10.04	‘15.07.22 ~‘15.10.19	15일간

마. 연기사유

-  추가 공사 발생으로 인한 절대공기 부족

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 공원 안전시설 보수 및 정비, 시설비(100-401-01), 시설물 옥상방수 및 구조체 보수

붙임 : 공사기한 연기 검토 보고서 1부.  끝.

	시설과장
★주무관	이강호		주무관	代이강호		시설과장	09/23 공헌구
협조자
시행	시설과-5846	(		)	접수		(		)
우			/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7411	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개