문서번호	정수시설과-8979
결재일자	2015.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김왕주		代김오열	09/23 임정규
협조

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

『입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송 용역』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

영등포아리수정수센터

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

『입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송 용역』의 물량 증․감 및 신규공정 발생에 따른 설계변경을 시행코자 자체 심의위원회를 개최하고 심의결과를 보고드림

용역현황

용 역 명 : 입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송 용역

용역 개요

- 입상활성탄 재생 : 541㎥

- 안트라사이트 이송 : 114㎥

계약 금액

- 도급액 : 255,741,870원

용역 기간

- 용역기간 : ‘15. 6. 23 ～’15. 10. 20

도 급 자 : 제성화학공업㈜ 대표자 성하천

설계변경 현황

시공물량 및 신규공종 설계변경 현황

- 시공물량 증 ․ 감 및 신규공종에 따른 설계변경

공 종	단위	구 분	수 량	증․ 감
안트라사이트 굴상 및 반입	㎥	당 초	114	감) 23
		변 경	91
활성탄 굴상 및 반출	㎥	당 초	541	감) 1
		변 경	540
활성탄 반입 및 포설(재생용)	㎥	당 초	417	감) 1
		변 경	416
활성탄 상,하차(굴상+반입)	㎥	당 초	958	증) 2
		변 경	956
활성탄 이송(센터<->공장)	㎥	당 초	958	감) 2
		변 경	956
활성탄 재생(전) 수량	㎥	당 초	541	감) 1
		변 경	540
활성탄 재생(후) 수량	㎥	당 초	417	감) 1
		변 경	416

․ 상기와 같이 시공한 바 물량변경이 발생하였으며,

․ 설계시 활성탄 운반거리를 172km 산정, 12,180원/㎥ 적용 설계하였으나 계약후

우리정수센터에서 공장(연천군 전곡읍)까지 거리를 측정한 바 86km로(당초

거리의 1/2) 6,090원/㎥로 감액

․ 건강보험료(874,660원 → 0원), 연금보험료(1,314,181원 → 0원), 노인장기  요양보험료(57,290원 → 0원), 건설기계 대여금 지급보증수수료(122,868원 → 0원)미납에 따른 감액

용역비 설계변경 현황                                     (단위:원)

구 분	계약금액	설계변경금액	증 감	비 고
도 급 비	255,741,870	244,860,000	-10,881,870

심의위원회 심의내용

시공물량 증 ․ 감 및 신규공정에 대한 적정성 검토

제경비 산출, 적용 적정성 검토

제경비 정산(보험료 정산 등) 적정성 검토

심의위원회 심의결과

위 원 장 : 정수시설과장(대직)공업6급 김오열

위    원 : 공업6급 오재승외 4명, 간사 1명

일    시 : 2015.9.23(월) 13:00 ~ 14:00(2층 사무실)

안    건 : 입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송 용역 설계변경 적정성 여부 및 내역 검토

심의결과 : 적정함

조치의견

위와 같이 시공물량 변동 및 신규공종 발생으로 인한 설계변경을 자체 심의위원회 심의결과에 따라 설계변경 시행코자 함.

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의위원회 의견서 1부. 끝.