문서번호	정수시설과-8965
결재일자	2015.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김왕주		代김오열	09/23 임정규
협조

『입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송용역』

설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09.

영등포아리수정수센터

『입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송용역』

설계변경 보고

우리 영등포아리수정수센터 『입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송 용역』의 시공수량 등의 증․감이 발생되었기에 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 보고드림

공사현황

공 사 명 : 입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송 용역

공사개요

- 입상활성탄 재생 : 541㎥

- 안트라사이트 이송 : 114㎥

용역기간 : 2015. 06. 23 ~ 2015. 10. 20

도 급 액 : 255,741,870원

도 급 자 : 제성화학공업㈜ 대표자 성 하 천

설계변경 근거

공사계약 일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금약 조정)

지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제39조 내지 제42조 및 건설기술관리법 제26조 5 제3항 및 같은법 시행규칙 제28조 2조의2에 의거 보험료 사후정산

검토 내용

설계변경 사유

- 시공물량 증 ․ 감에 따른 설계변경

․ 시공물량(증감) 현황

공 정	규 격	단 위	구 분	수 량	증․ 감
안트라사이트 굴상 및 반입		㎥	당 초	114	감) 23
			변 경	91
활성탄 굴상 및 반출		㎥	당 초	541	감) 1
			변 경	540
활성탄 반입 및 포설	재생용	㎥	당 초	417	감) 1
			변 경	416
활성탄 상,하차	(굴상+반입)	㎥	당 초	958	감) 2
			변 경	956
활성탄 이송(왕복)	(센터<->공장)	㎥	당 초	958	감) 2
			변 경	956
활성탄 재생(전) 수량		㎥	당 초	541	감) 1
			변 경	540
활성탄 재생(후) 수량		㎥	당 초	417	감) 1
			변 경	416

- 활성탄 이송비 변경

․ 당초 운반거리 172km에서 86km로 운반거리가 반으로 줄어듬에 따라 운반비 12,180원/㎥에서 6,090원/㎥으로 감액

용역비 변경내용

구 분	금 액		증, 감	비 고
	당초 금액	변경 금액
도 급 비	255,741,870	244,860,000	감) 10,881,870

- 건강, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 건설기계대여금 지급보증수수료 미납에 따른 감액

․ 건강보험료(874,660원 → 0원) 미 납부로 감액

․ 연금보험료(1,314,181원 → 0원) 미 납부로 감액

․ 노인장기요양보험료(57,290원 → 0원) 미 납부로 감액

․ 건설기계대여금 지급보증수수료(122,868원 → 0원) 미 납부로 감액

처리 의견

상기 공종별 수량변동 등에 대한 설계변경건에 대하여 설계변경 심의 및 준공 처리절차 운영계획에 의거 설계변경 심의위원회를 개최하고, 심의결과에 따라 준공 처리코자 합니다.

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 수량변경 관련 서류 1부.  끝.