투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	「다국어 안내표지판 조달구매」납품기한 연장의뢰

조경지원과 산하공원 다국어 안내표지판 조달구매와 관련하여 아래와 같이 납품기한 연장을 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 다국어 안내표지판 조달구매

나. 계약금액 : 금17,569,460원(금일천칠백오십육만구천사백육십원)

다. 납품기한 : 2014.1.7.(계약일 2013.11.28.)

라. 계 약 자 : 오성씨앤디 대표 김성옥

마. 납품기한연기

1) 연기사유 : 시안수정사항 발생에 따른 제작기간 연장이 불가피함

2) 납품기한 변경 : (변경전)2014.1.7. → (변경후)2014.1.17

바. 예산과목

- 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 금연구역 단속운영, 일반운영비, 사무관리비

- 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원유지관리 및 보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비

붙  임 : 납품기한 연기 조치의뢰서 1부.  끝.

	조경지원과장
주무관	엄정화		조경지원과장	01/06 김제중
협조자	주무관	곽동훈
시행	조경지원과-130	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로20길 33(신대방동395)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-2181-1176	/전송	02-2181-1179	/	jh0276@seoul.go.kr	/	대시민공개