함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 및 차수별 금액변경 시행(2014년 도봉구관내 급수공사)-2차,최종

1. 우리 사업소에서 시행중에 있는 “2014년 도봉구관내 급수공사(단가계약)”에 대하여 신규공종 및 물량 증˙감 발생으로 인한 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 설계변경 및 차수별 금액변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 도봉구관내 급수공사(장기계속단가계약)

나. 계약업체 : 호용종합건설(주) 대표 김익관

다. 공사기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 6. 30 (총부기기간 : 2014. 6. 10 ~ 2015. 6. 30)

라. 계약금액 변경내역                                                           (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증,감
총 부기금액	575,409,560	574,687,000	감) 722,560
1차 부기금액	437,702,000	437,702,000	-
2차 부기금액	137,707,560	136,985,000	감) 722,560

마. 설계변경사유 : 신규공종 및 시공물량 증감에 따른 계약금액 변경

바. 예산과목 : 상수도사업비,영업비,급수공사비,신설공사비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비

상수도사업비,영업비,배급수비,수선교체비

첨 부 : 1) 설계변경 심사결과보고서 1부.

2) 설계변경 내역서  1부.

3) 변경합의서 1부. 끝.

주무관	윤승구		급수운영과장	김수영		북부수도사업소장	06/24 문윤기
협조자	주무관	최용진		주무관	한경란		계약2팀장	홍연화
시행	급수운영과-11535	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 377	/
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	yseong9@seoul.go.kr	/	부분공개