투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	동작구청장(도로관리과장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 공사기간 변경 승인 [동작구 흑석동 파출소 앞 교통안전시설물 설치공사(신호)]

1. 동작구 도로관리과-103253호(2015.08.19.), 도로관리과-104349호(2015.09.11.),서울지방경찰청 교통관리과-32908호(2014.11.26.), 교통관리과-21338호(2015.7.30.), 교통관리과-25488호(2015.09.11.)와 관련입니다.

2. 흑석동 파출소 앞 교통안전시설물(신호) 설치공사에 따른 노량진역 앞 추가 사항 관련 교통안전시설물설치 원인자부담공사의 공사기간 변경을 아래와 같이 승인하오니 교통사고 예방 및 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 흑석동 파출소 앞 교통안전시설물(신호기) 설치공사

(노량진역 앞 교통안전시설물 설치공사 추가)

나. 공사기간

- 당초 : 신호 2015.08.24 ~ 2015.09.30

- 변경 : 신호 2015.08.24 ~ 2015.11.07

다. 변경사유 : 공사 물량 추가로 인한 공기연장

라. 공사장소 : 동작구 흑석동 27-83 흑석2치안센터 앞

마. 원 인 자 : 동작구청 도로관리과

바. 공사관리번호 : 신호 2015-0201-046

사. 관련업체 및 공사내용

구 분	설 계	감 리	시 공	공 사 개 요
신호기	㈜트래픽스	㈜트래픽스	㈜초석전기	교통신호기설치공사 1식

3. 공사완료후 7일 이내에 준공요청 공문과 준공서류(감리경유)를 제출하여 주시기 바랍니다.(준공관련 도면, 준공사진, 기타 관련서류 등 CD포함 이메일 발송) 끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	박종근		기전과장	09/24 유재옥
협조자	주무관	허송욱
시행	기전과-4467	(		)	접수		(		)
우			/
전화	(02)3284-5458	/전송	02)3284-5470	/		/	대시민공개