함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행

1. 우리 영등포아리수정수센터 『입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송 용역』 시행 중 설계변경 사유가 발생되어 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 건     명 : 입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송 용역

나. 계 약 자 : 제성화학공업(주)  대표자 성하천

다. 용역기간 : 2015. 06. 23. ~ 2015. 10. 20.

구 분	계약금액	설계변경금액	증 감	비고
용역비	255,741,870	244,860,000	-10,881,870

라. 설계변경 내용

마. 설계변경 사유

- 공종별 물량증감 및 신규공종 발생에 따른 설계변경

- 건강, 연금, 노인장기요양보험료, 건설기계대여금 지급보증수수료 정산

첨부 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

주무관	김왕주		정수시설과장	代김오열		영등포아리수정수센터소장	09/24 임정규
협조자	주무관	박소현
시행	정수시설과-9027	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화		/전송		/		/	대시민공개