문서번호	시설보수과-7516
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	09/24 조병준
협조

자체정밀점검 점검기한 연기

(궁동터널, 서울교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09.

자체 정밀점검 점검기한 연기

우리사업소와 외부전문가가 합동으로 궁동터널, 서울교에 대한 자체 정밀점검을 추진중에 있으나 서울교는 현재 보수공사가 진행중에 있으며, 또한 신축이음장치 유간 협착 원인분석 등을 위한 점검기간 부족으로 점검기한을 연기조치 후 업무수행에 철저를 기하고자 함

□ 점검대상 시설물

연번	시 설 명	종별	시설규모(m)		구 조 형 식	준 공 년 도	점 검 구 간	노 선 명	비고
			폭	연장
1	궁동터널	1종	25	140	BOX	2001년	전구간	신정로
2	서울교	2종	55.5	236	PSCB	2004년	전구간	경인로	DB-24

□ 점 검 자

○ 사 업 소 : 시설6급 윤동원(시설물담당자)

○ 외부전문가 3인

- 특급기술자 : 하상우 (대신엔지니어링, 자격등급 : 특급)

- 고급기술자 : 김성수 (대신엔지니어링, 자격등급 : 고급)

- 중급기술자 : 이종명 (대신엔지니어링, 자격등급 : 중급)

□ 점검추진 내용

○ 기존자료 수집 및 분석

○ 시설물 외관조사 및 시험

○ 시설물에 대한 상태평가

○ 보수, 보강방법 및 유지관리방안 제시

○ 점검결과 정리 및 보고서 작성

□ 문제점 및 조치방안

○ 자체점검대상 시설물인 서울교의 보수공사가 진행중(공종 85%)에 있으며, 또한 서울교 남․북단에 설치되어 있는 신축이음장치의 유간 협착 및 단차발생의 변이가 발생하였는바

○ 이에 따른 신축이음장치, 낙교방지시설 등에 계측기 설치 및 관찰로 철저한 원인을 분석코자 하며 이에 소요되는 공기만큼을 연기조치하여 업무수행에 만전을 기하고자 함

□ 점검기간 연기

○ 당  초 : 2015. 4. 20 ~ 9. 23

○ 변  경 : 2015. 4. 20 ~ 11. 23

○ 귀책사유 : 강서도로사업소

□ 향후 조치계획

○ 서울교 보수공사(공종 85%)가 완료되면 금번 공사에 반영되어 있지 않은 신축이음장치 유간협착부에 계측기를 설치하여 변이 관측등 원인분석후 조치방안 검토

○ 자체 정밀점검완료 후 외부전문가 수당 지급: 14,815,718원.  끝.