문서번호	시설개선과-8182
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
이상욱		09/24 신동호
협 조

- 잠실주경기장 -

석면 해체·철거 관련 회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 잠실주경기장 -

석면 해체·철거 관련 회의 결과 보고

□ 사업개요

- 사 업 명 : 잠실주경기장 석면 해체철거 및 천정교체공사

- 공사기간 : 2015. 10.05 ~ 12.05

- 공사규모 : 잠실주경기장 지하1층 A구간 석면 2,811㎡ 해체

- 시 공 사 : ㈜미래온종합건설 대표 김대규/명성항타(주) 석면해체

□ 회의결과 보고

보 고 내 용
건 명	잠실주경기장 석면 해체․철거 및 천정교체 공사관련 회의
회의개요	◯ 회의일시 : 2015. 9. 23(수) (16:00~17:00) ◯ 회의장소 : 잠실실내체육관 1층 회의실 ◯ 회의내용 - 석면 해체․철거 및 천정교체 공사 관련 분야별 사전 검토 - 이랜드 축구경기에 따른 공사시기 및 일정 조정 등 협의 ◯ 회의참석자 - 건축,기계,전기,소방 공사담당 - 운영기획과 공유재산담당, 스포츠마케팅과 대관담당 - 공사 시공자(석면) 및 석면감리자, 이랜드 담당자
회의결과 및 후속조치	◯ 석면 해체·철거관련 송파구청, 고용노동부 신고 사전 실시(10월중) ◯ 석면해체·철거 공사 실시 : 2015. 11.08일 시행(이랜드 경기종료 후) ◯ 기타 공사 및 감리기간 계약변경 추진 - 공사기간 `15.12.20일까지 연장 - 감리 감리기간 (`15.10.05~10.10→11.08~11.17) 변경

붙   임 : 회의자료 및 참석명부 1부. 끝.