문서번호	서울숲공원관리사무소-5530
결재일자	2015.9.24.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	서울숲공원관리사무소장
허민	현호재	09/24 배정복
협 조
	운영팀장		최원아

2015년 서울숲 수경시설 청소용역 설계변경 보고

2015. 09

2015년 서울숲 수경시설 청소용역

설계 변경 보고

용역 개요

- 변경전

가. 용 역 명 : 2015년 서울숲 수경시설 청소용역

나. 도 급 액 : 금18,850,390원 (분수시설 70회)

다. 계 약 자 : **************************

라. 용역기간 : 2015. 4. 28 ~ 2015. 9. 30

- 변경후

가. 용 역 명 : 2015년 서울숲 수경시설 청소용역

나. 도 급 액 : 금16,456,000원 (분수시설 63회)

다. 계 약 자 : *************************

라. 용역기간 : 2015. 4. 28 ~ 2015. 9. 30

설계변경 사유

- 수경시설 청소용역횟수 감소로 인한 정산조치.

- 건강보험 등 4대보험 증빙서류 미제출 및 감액으로 인한

정산조치.

구 분	변경내용	비 고
제경비	□ 재료비, 노무비, 경비 등 감액 ․ 재 료 비 : 변경전 291,437 → 변경후 : 262,269 ․ 노 무 비 : 변경전 12,528,600 → 변경후 : 11,275,740 ․ 경 비 : 변경전 740,950 → 변경후 : 666,855 □ 4대보험 등 감액 ․ 산재보험료 : 변경전 225,514 → 변경후 : 0 ․ 고용보험료 : 변경전 112,757 → 변경후 : 0 ․ 국민연금보험료: 변경전 645,485 → 변경후 : 595,800 ․ 건강보험료 : 변경전 435,344 → 변경후 : 284,340 ․ 노인장기요양보험: 변경전 28,515 → 변경후 : 17,960 □ 일반관리비 : 변경전 750,430 → 변경후 : 655,148 □ 이 윤 : 변경전 1,377,687 → 변경후 : 1,201,888	- 29,168 - 1,252,860 - 74,095 - 225,514 - 112,757 - 49,685 - 151,004 - 10,555 - 95,282 - 175,799

변경 내용

구 분		금 액			비 고
		변경전	변경후	증 감
총 용 역 비		18,850,390	16,456,000	-2,394,390
도급비	공급가액	17,136,719	14,960,000	-2,176,719
	부가가치세	1,713,671	1,496,000	- 217,671
	계	18,850,390	16,456,000	-2,394,390

설계변경금액

따로붙임 : 변경설계서 1부. 끝.