문서번호	기전과-6706
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이명호		차준원	09/24 최주용
협조

『2015년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

감리 실정보고서 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09

성동도로사업소

(기 전 과)

『2015년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

공기연장 검토 보고

2015년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 4차, 5차 작업지시에 대한 감리원의 공기연장 실정보고가 있어 의견 검토 후 그 결과를 보고 드림

관련근거

○ ㈜영호이앤씨 영호 본 2015-163호(2015.09.24.)

공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 교통안전표지 유지보수공사(연) 4,5차 작업지시 실정보고서 제출

○ 공사기간 : 2015. 06. 08 ~ 2015. 09. 30

○ 도 급 자 : ㈜대상에프엔씨 조성두

○ 감 리 원 : ㈜영호이앤씨 감리원 김남철

감리원 의견 및 검토결과

○ 변경내용

연번	작업차수	장소	현황 및 문제점	감리의견	검토결과
1	4차 작업지시	보훈회관 앞	신호기 및 노면도색 미작업	신호기 및 노면표시 작업이 완료되지 않아 공사기간 연장 (2015.10.30.)	신호기 및 노면표시 작업이 완료될때까지 공사기간을 연장하여 시공 완료 하는 것이 타당함.
2	5차 작업지시	성원아파트앞	신호기 및 노면도색 미작업	신호기 및 노면표시 작업이 완료되지 않아 공사기간 연장 (2015.11.30.)

조치의견

○ 실정 보고에 대한 감리원의 의견을 검토한 결과 선행공정 지연으로 후속

공정인 교통안전 표지판 설치가 어려워 이를 현장여건에 맞도록 기간연장        및 시공토록 감리자에게 지시 하고자 합니다.

붙    임 : 1. 감리 실정보고서 제출 1부. 끝.