문서번호	물재생과-6356
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
차성민		강병수	09/24 김동기
협조
	주무관		최승룡

『중랑물재생센터 차집관로 준설공사』

중랑천 퇴적고 조사 결과 및 준설계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.09

중랑물재생센터

(물재생과)

『중랑물재생센터 차집관거 준설공사』

중랑천 퇴적고 조사 및 준설계획 보고

우리센터에서 유지관리하고 있는 중랑천 차집관거 내 준설토 퇴적고 조사를 실시하고 그 결과에 대한 보고임

Ⅰ		공 사 현 황

○ 공 사 명 : 2015년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2015.05.18 ~ 2015.12.31

○ 도 급 자 : (주)성경건설 대표 : 조경환

○ 도 급 비 : 539,245천원

○ 공사개요 : 준설량 : 4,600㎥

- 활차 및 로봇준설 등(혼기젯트 펌프 흡입) : 1,000㎥

- 기계준설(주간) 2,000㎥, 기계준설(야간) 800㎥

- 버켓준설 : 350㎥, 유입동 : 200㎥, U형수로 준설 : 250㎥

Ⅱ		퇴적고 조사

○ 조사기간 : 2015.09.23

○ 조사구간 : 중랑천(장안교 ~ 장평교, 연장 935m)

Ⅲ		조 사 결 과

(세부현황 붙임)

○ 퇴적고 조사 결과 평균 퇴적량은 43.8cm

Ⅳ		조 치 의 견

○ 퇴적량이 개략 1,390㎥로 조사구간 준설 시행

○ 개략공사비 : 116,760천원

- 활차 및 로봇준설 등(혼기젯트 펌프 흡입) : 1,390㎥×84,000원=116,760천원

○ 준설 완료 후 정산 시행

Ⅴ		행 정 사 항

○ 준설 대상구간은 보행자 통행이 많아 냄새 등으로 인한 민원이 예상되므로

준설토를 센터내로(배양조동 앞) 반입하여 임시 적치 후 반출 하고자 함.

※ 기존 준설토 야적장에 슬러지 케익이 적치되어 있어 준설토 적치 공간이 없음

○ 중랑천(장안교 ~ 장평교)구간 준설 시행토록 도급자에게 작업지시

붙임서류 : 1. 준설토 퇴적고 조사 현황 1부.

2. 중랑천 퇴적고 조사 및 작업지시구간 위치도 1부.

3. 준설토 야적장 위치도 1부.  끝.