문서번호	급수운영과-16566
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
최지영	한호진	09/24 전명수
협 조

준공기한 연기 보고(신90)

명에 의거 2015년 석촌동외 11개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

1. 보고 요지 : 급수공사 준공기한 연기

2. 공사 현황

지시번호	공사위치	공사개요	기존공사기간	변경공사기간
신설-90	잠실동215-5	D30㎜ L2m	2015.9.19~2015.9.25	2015.9.19~2015.10.26

3. 연기사유 및 기간

- 연기사유 : 신축현장 공사지연(가설물 미철거)으로 인함

4. 지체상금 부과여부 : 미부과

5. 조치내용

상기와 같은 사유로 급수공사일정 연기를 요청함에 따라 변경된 공사 기간을 거승건설㈜ 대표 한영주에게 통보코자 합니다.  끝.