투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	지하철 9호선3단계 시스템분야 전면책임감리용역(1차) 변경계약 의뢰

1. 재무과-58973호(`14.12.31) 및 도시철도설비부-9632호(`15.9.18)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리본부에서 시행중인 서울지하철 9호선3단계 시스템분야 전면책임감리용역(1차)에 대한 계약변경을 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : *********************************

나. 용역개요 : 연장 9.14km, 정거장 8개 역사(931 ~ 938정거장)

- 위 치 : 송파구 종합운동장 ~ 강동구 둔촌동(보훈병원앞)

- 범 위 : 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 시설공사 책임감리

다. 계 약 자 : 세종기술(주) 외 2개사 공동도급(분담이행방식)

라. 계약일자 : 2014.12.29

마. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도

9호선 3단계건설, 시설비 및 부대비, 감리비

바. 변경내용

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
총차	기 간	`15. 1. 5 ~ `16.12.31	변경사항 없음
	금 액	2,901,630천원	변경사항 없음
1 차	기 간	`15. 1. 5 ~ `15. 9.30	`15. 1. 5 ~ `15. 12.31	연장 92일
	금 액	200,000천원	변경사항 없음

사. 변경사유

- 1차 감리용역중 감리원 및 현지 차량·사무원 투입시기 조정

붙임 : 1. 계약변경 시행 보고서 - 1부.

2. 감리원 변경 투입계획(1차 - 2회) 및 변경계약 내역서(1차) - 각 1부.

2. 변경계약 합의각서(1차) - 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	고명규		송변전과장	박동규		도시철도설비부장	09/24 정찬웅
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	도시철도설비부-9873	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7272	/전송	02)772-7308	/	rhaudrb@seoul.go.kr	/	대시민공개