함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행[아차산로배수관부설공사]

우리사업소에서 시행중인『아차산로배수관부설공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공사명 : 아차산로배수관부설공사

나. 도급자 : 동영개발 대표 황 현

다. 공사기간 : 2015.5.18. ~ 10.02.

라. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 시공물량 증,감 등

마. 설계변경 금액 내역

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
도급비	191,190,330원	180,730,000원	감) 10,460,000원
공급가액	173,809,391원	164,300,000원	감) 9,509,391원
부 가 세	17,380,939원	16,430,000원	감) 950,939원

바. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후송배수관정비)

첨부 :  1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 심의의뢰서 및 심의위원 의결서 각 1부.

3. 설계변경 심의위원회 개최 결과보고서 1부.

4. 변경 합의서1부. 끝.

주무관	권영안		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	최명익		동부수도사업소장	09/25 홍현구
협조자
시행	급수운영과-25634	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2742	/전송	02-3146-2789	/	kwon1901@seoul.go.kr	/	부분공개(6)