문서번호	기획관리과-8942
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
김운기		김안철	09/25 이계헌
협조

데이터센터 석면 해체·제거 공사 완료 보고

2015. 9.

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

석면 해체·제거 공사 완료 보고

우리 센터 내 석면이 함유된 것으로 조사된 건축자재에 대한 해체‧제거 공사가 완료됨에 준공검사를 완료하고 그 결과를 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 데이터센터 석면해체‧제거 공사

○ 공사기간 : 2015. 9. 2 ~ 9. 16(총 14일)

○ 공사금액 : 12,640,600원 (예비가격  : 14,405,400원)

○ 시 공 자 : ㈜세영씨엔에스 대표 이영현

□ 추진경과

○ ‘15. 7. 30	:	석면해체·처리 계획 수립
○ ‘15. 8. 26	:	시공업체 선정 및 공사계약
○ ‘15. 9. 2	:	착공신고
○ ‘15. 9. 15	:	공사완료 및 준공서류 접수

□ 공사결과

○ 석면자재 해체 : 586.19㎡ (텍스 538.29㎡/밤라이트 47.90㎡)

층별 용도		석면면적(㎡)
		당초	기 해체	금회 해체	해체 후
합계		707.65	121.46	586.19	0
지하1층	여자체력단련실, hall, 화장실 축전지실, (여자탈의실)	272.76	32.72	224.06	0
지상1층	창고, 강사 · 기사 대기실,	92.24		92.24	0
지상2층	화장실, U-Work 탕비실, (공조실)	51.40	39.7	11.70	0
지상3층	화장실, 시스템실 내실, (공조실)	111.41	38.4	51.73	0
지상4층	인터넷통신과 탕비실 강당 창고, (화장실)	103.01	10.64	81.73	0
옥탑층	hall, E/V실	76.83		76.83	0

※ (  )은 내부공사로 인한 석면자재 기 해체 부분

○ 지정폐기물 처리    : 폐석면 9.05톤

□ 준공검사

○ 검사내용 : 별첨 “준공검사조서” 참조

○ 검사결과 : 계약내용, 품질관리기준에 적합하게 시공 됨

□ 행정사항

○ 준공검사 결과에 따라 준공 처리

○ 석면건축물 제외 요청 (기후대기과, 서초구청 푸른 환경과)

○ 공사대금 지급

- 예산과목 : 정보서비스의 안정적 제공, 정보서비스 물적 인프라 관리 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지보수, 시설비

붙임 : 1. 준공검사조서(별첨) 및  1부.

2. 준공사진대지 및 준공검사 체크리스트 각 1부.  끝.