문서번호	급수운영과-25576
결재일자	2015.9.25.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
권영안	김태형	최명익		09/25 홍현구
협 조

설계변경 및 계약금액 검토보고

(아차산로 배수관부설공사)

2015.9

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

『아차산로 배수관부설공사』

설계변경 및 계약금액 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 『아차산로 배수관부설공사』와 관련하여 신규공종 및 시공물량 증 ․ 감에 따른 설계변경 및 계약금액 조정이 요구되어 검토후 보고 드림.

1		관련근거

○ 서울특별시 시설관리공단 공사감독2처-15477호(2015.09.25)

(“설계변경(정산)승인요청 ”)

2		공사현황

○공 사 명 : 아차산로 배수관부설공사

○공사기간 : 2015 5.18 ~ 10.02

○도 급 액 : 191,190,330원

○공사개요 : D=200~500mm, L=470m

○도 급 자 : 동영개발 대표 황현

3		보고내용

□ 설계변경사유

○ 확인굴착 추가실시

- 관련근거 : 공사감독2처-9640(15.07.07)

- 내     용 : 분기부(1,350/500) 및 관부설 지점에 지장물이 다수 매설되어 있어    관로 선형 선정을 위한 추가 확인굴착을 실시

○ 굴착폭 확대(B=1.2m→1.3m)

-  관련근거 : 공사감독2처-12255(15.08.13), 급수운영과-21182(15.08.17)

-  내     용 : 관부설(D=500mm) 후 포장도로복구 시 성동도로사업소에서 사용하는                   다짐장비의 폭이 B=1.3m인 사유로 다짐품질 확보를 위한 굴착폭 확대실시

○ 아스팔트 폐기물량 증가

-  관련근거 : 공사감독2처-12655(15.08.20), 급수운영과-22710(15.08.31)

-  내      용 : 관부설 지점의 포장도로가 A-1으로 설계되었으나 굴착결과 아스팔트     두께가 상이함

○ 품질시험 실시

-  관련근거 : 공사감독2처-12830(15.08.24), 급수운영과-24747(15.09.18)

-  내     용 : 분기부(1,350/500)에 기존관(D=1,350mm)에서 분기 시 용접작업이     시행됨에 따라 자분탐상검사를 실시하여 품질관리에 철저를 기함

○ 변실규격 변경(구형→원형)

- 관련근거 : 공사감독2처-14596(15.09.15), 급수운영과-24747(15.09.18)

- 내     용 : 당초 구형변실로 설계되었으나 설치지점에 지장물이 과다하여 원형변실로     변경 설치함

○ 유량계실 설치(신규)

- 관련근거 : 급수운영과-23558(15.09.08), 공사감독2처-15041(15.09.21), 급수운영과-25135(15.09.22)

- 내     용 : 발주청의 추가작업 지시로 인하여 유량계실을 설치함

○ 지장물로 인한 확폭

-  관련근거 : 공사감독2처-15041(15.09.21), 급수운영과-25135(15.09.22)

-  내     용 : 분기 및 관부설 지점에 지장물로 인하여 부득이하게 확대굴착됨

○ 실시공 (주요)수량 정산 내용

공종명	규격	단위	수 량		비고(증,감)
			계 약	변 경
부 설 공	D200~500mm	m	470	489	증) 19m
원형밸브실 설치	D100~D500	개소	7	5	감) 2개소
구형밸브실 설치	D500	개소	2	-	감) 2개소
유량계실 설치	D500	개소	-	1	증) 1개소

○건강 및 노인장기요양보험료, 연금, 퇴직공제부금 실납부 금액 정산 반영

○ 공사금액 변경 내역                                            (단위: 원)

구 분	계 약 금 액	변 경 금 액	증·감	비 고
도 급 비	191,190,330	180,730,000	감) 10,460,330
공급가액	173,809,391	164,300,000	감) 9,509,391
부가가치세	17,380,939	16,430,000	감) 950,939

4		조치의견

○ 본 공사는 설계변경 심사 대상에서 제외되므로 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 설계변경의 적정성 및 신규공종 단가적용,물량 증감 등을 검토하여 의결한 내용에 따라 변경계약 및 정산 및 준공 시행에 만전을 기하고자 합니다.

※ 설계변경 심사대상 : 도급비 10%이상 증가시(재무회계과-563‘13.1.15)

붙 임 :  설계변경 내역서 및 보고서 각1부.끝.