문서번호	기전과-6745
결재일자	2015.9.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
차준원		09/25 최주용
협 조

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경 및 승인요청에 따른 검토보고(양원리길-신호,표지)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09

성동도로사업소

(기 전 과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경승인 및 승인요청에 따른 검토보고(양원리길-신호,표지)

교통안전시설물 원인자 부담공사 변경승인 및 승인요청이 있어 관련서류 및 현장 확인후 그 결과를 보고합니다

Ⅰ

관 련 근 거

서울지방경찰청 교통관리과-4881호(2015.02.26)

한국철도시설공단 건설총괄처-9232호(2015.07.28)

Ⅱ

공 사 개 요

공 사 명 : 경춘선 신내정거장 길내기 공사구간 교통안전시설물 공사

공사구간 : 중랑구 신내차량기지 주변(양원리길)

공사기간 : 2014.11.21 ~ 2015. 05. 30

공사개요 및 공사 참여자

구분	원인자	공사참여자			공사기간
		감리사	설계사	시공사	변경전	변경후
신호	한국철도시설공단	대영유비텍(주)		㈜한국전자통신엔지니어링	2014.11.21~ 2015.05.30	2014.11.21~ 2015.09.30
표지				태경이엔지(주)	승인일로부터~2015.09.30

Ⅲ

변경 및 승인요청 검토결과

구분	현황 및 문제점	검토결과
신호	추가 변경규제로 인한 공기 연장 및 지주 이설	서울지방경찰청 추가 규제로 인하여 공기연장 및 지주 이설이 타당함.
표지	대형편주 지주 교체 및 이설, 유턴 및 비보호 신설 표지판 신설	대형편주 지주교체 및 표지판 신설이 타당함

Ⅱ

검 토 결 과

- 교통안전 시설물 설치에 대한 「교통안전시설물 원인자부담공사」 변경승인 및 승인 요청건에 대하여 검토 결과 설계, 시공, 감리 업체의 자격 및 설계내용이 교통시설 설치공사 승인조건에 타당하여 「교통안전시설 설치공사 원인자 등 준수사항」 이행을 조건으로 승인하고자 합니다.

붙   임 : 1. 원인자 부담공사 변경승인 및 승인요청 1부.

2. 규제 1부.

3. 설계, 감리 시공사 자격서류 및 내역서, 도면 1부. 끝.