문서번호	도로포장연구센터-1574
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
김태우		백종은	09/25 한민희
협 조
	도로관리과장			송상영
	도로관리팀장			최연우
	도로보수과장			이규철

「서울시 도로포장 공용수명 증대를 위한」

특수아스팔트포장공법 시험시공 계획 보고

2015.09

서울특별시 품질시험소

(도로포장연구센터)

「서울시 도로포장 공용수명 증대를 위한」

특수아스팔트포장공법 시험시공 계획 보고

서울시 도로포장의 수명을 향상시키기 위한 특수아스팔트포장공법의 공용성 및 적용성을 평가하기 위한 시험포장을 실시하고자 함

Ⅰ			추진배경

○ 도로포장 수준향상을 위한 방안 【시장님 보고, `13.08.20】

○ 도로포장 수준향상을 위한 개선방안 【행정2시장방침-제300호, ‘14.02.21】

○ ‘서울형 도로포장 설계법’ 개발 【‘15.06.30】

○ 서울형 도로포장 설계법 적용을 위한 1차 시험시공 계획 【‘15.07.07】

○ ‘서울시 차도혁신 종합대책’ 시장님 보고 【‘15.08.20】

Ⅱ			시험시공 개요

□ 목적 및 필요성

○ 서울시 교통량은 고속도로 대비 약 1.3배, 국도 대비 약 5배가 많아 이로 인한 피로균열, 소성변형 등으로 인한 파손이 빠르게 발생하고 있음

○ 버스전용차로와 같이 중차량 교통량이 많은 구간에는 SMA 및 개질아스팔트(PSMA)를 적용하고 있으나, 보다 다양한 조건에서 적용할 수 있는 포장재료에 대한 검토가 필요함

○ 균열 및 소성변형 저항성이 우수한 섬유보강재를 이용한 특수아스팔트포장 공법을 시험포장에 적용하여 공용성 및 적용 가능성을 평가하고자 함

□ 시험포장 구간 및 단면결정

○ 서울형 포장설계법 시험포장 구간(서부도로사업소)

- 위치 : 서오릉로 구산역사거리~역촌사거리, 3차로 구간(약 380m)

- 도로포장 현황 : 1) 2009년 시공

2) SPI 3.52(균열률 4.3%, 소성변형량 10.3mm, IRI 8.5m/km)

3) 하부층 수분손상 발생

○ 시험포장 단면 설계

- 균열깊이가 11.5cm로 10cm 절삭

- 10cm 아스팔트 덧씌우기 공법 적용

구간	중간층	표층
일반	밀입도 (WC-3)	SMA(13mm)
특수 A		섬유그리드+SMA(13mm)
특수 B		섬유보강아스팔트(13mm SMA 입도)

□ 시공 및 추적조사 일정

○ 시공일정 : 2015년 10월 중 3일(예정)

○ 현장조사

- 시공 전 : 포장노면상태 평가, 포장균열 깊이 측정

- 시공 중 : 섬유그리드 시공성, 섬유보강아스팔트 생산 및 시공성 평가

- 시공 후 : 초기 1년간 분기별 포장상태 평가, 이후 장기공용성구간(LTPP)으로 연간 1회 조사

□ 특이 사항

○ 섬유를 이용한 특수아스팔트포장공법으로 공법별 자체 시방서 적용

○ 섬유그리드 재료 및 시공 비용 참여사에서 부담

○ 섬유보강아스팔트용 섬유보강재 비용 참여사에서 부담

□ 예 산

○ 예산항목 : 도로관리과 노후포장도로 유지관리비

○ 소요예산 : 도로관리과에서 서부도로사업소로 예산 재배정

□ 기대효과

○ 신재료·신기술 공법을 공용중인 도로에 적용하여 서울시 도로포장 적용성 및 공용수명을 정확하게 평가할 수 있음

○ 공용성능이 매우 우수한 특수아스팔트포장을 조기파손 구간에 적용할 경우 잦은 보수에 의해 발생되는 예산을 절감 할 수 있음

Ⅲ			행정사항

□ 예산 재배정(도로관리과 ⇒ 서부도로사업소)

□ 공사 발주 및 이행각서 체결

○ 공사감독은 서부도로사업소(도로보수과)와 품질시험소가 공동 시행

○ 시험시공 이행각서 체결 시행(참여사  ⇄ 서부도로사업소)

	이행각서 주요 내용
□ 시험시공 후 발생하는 하자, 하자로 인한 민․형사상 책임 및 지식재산권 관련 분쟁 등에 대한 내용 □ 하자보수기간 : 2년

Ⅳ			향후 추진계획

○ `15.9월       : 표면상태 조사 및 하부지지력 평가 수행

○ `15.10월 초   : 공사발주

○ `15.10월 말   : 시험시공 시행

○ `16.9월 ~    : 표면상태 조사 시행

○ `17.9월 ~    : 표면상태 조사 및 하부지지력 평가 시행

붙임 : 1) 섬유그리드아스팔트 포장공법

2) 섬유보강아스팔트 포장공법.  끝.