투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 서울숲 수경시설 청소용역 설계변경(정산) 시행

1. 서울숲공원관리사무소-5530(2015 .9. 24),호와 관련입니다.

2. 우리 서울숲공원관리사무소에서 시행하는「2015년 서울숲 수경시설 청소용역」에

대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2015년 서울숲 수경시설 청소용역

나. 용역기간 : 2015. 4. 28 ~ 2015. 9. 30

다. 계 약 자 : **************************

라. 예산과목 : 동부공원녹지사업소공원운영과, 공원녹지관리수준향상및도시녹화지원,

공원관리및도시녹화지원, 동부푸른도시사업소산하공원유지관리, 일반

운영비, 공공운영비

마. 설계변경내용

○ 변경사유

- 수경시설 청소용역횟수 감소로 인한 정산조치(70회 → 63회).

- 건강보험 등 4대보험 증빙서류 미제출 및 감액으로 인한 정산조치.

구 분		금 액		증 감	비 고
		변 경 전	변 경 후
도 급 비	합 계	18,850,390	16,456,000	감 2,394,390
	공급가액	17,136,719	14,960,000	감 2,176,719
	부가가치세	1,713,671	1,496,000	감 217,671

○ 변경내역

따로붙임 : 설계변경보고서 및 설계변경내역서 각 1부. 끝

주무관	허민		시설팀장	현호재		서울숲공원관리사무소장	09/25 배정복
협조자	운영팀장	최원아		주무관	김일환		주무관	代지정희
시행	서울숲공원관리사무소-5553	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273	/
전화	460-2926	/전송	460-2930	/	mheo@seoul.go.kr	/	부분공개