문서번호	시설관리과-22794
결재일자	2015.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이승영		김대성	09/21 우종근
협조

설계변경(제1회) 보고서

(2015년 동작 영등포구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

2015. 09.

남부수도사업소

시설관리과

설계변경(제1회) 보고서

2015년 동작 영등포구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 시행시 현장 여건에 적합한 시공으로 인한 신규 공종 및 계약물량이 증․감됨에 따라 아래와 같이 설계변경을 시행코자 함

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 2015년 동작 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

(장기계속공사단가계약)

계약상대자 : 성신진흥산업개발(주) 대표 김보민

공사개요 : 제수밸브설치 367개소, 변실 설치 359개소

계약금액 : 666,119,100원

공사기간 : 2015.4.6 〜 2016.5.31

Ⅱ		설계변경 근거

지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액조정)

지방자치단체 공사계약 일반조건(예규 제325호)‘6(공사설계의 변경)-(설계변경)-다’의 규정

Ⅲ		설계금액 변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 감 액
도 급 비	666,119,100원	666,119,100원	금액변경 없음

Ⅳ		주요 설계변경 사유

단수범위가 넓어 시민불편을 최소화 하기 위한 부단수 공법 적용 및 대형 밸브 기어고장 수리 등에 따른 89개 신규공종 발생

※ 상수도공통대가 등에 낙찰율 86.745%를 적용하여 설계변경

기타 현장에 적합한 시공 등으로 인한 계약물량 증감 발생

Ⅴ		조치의견

위와 같이 주요 설계변경 사유로 인하여 계약금액이 감액되므로 계약심사과-227(2009.1.20)호 『09년 소규모 상수도공사 설계심사 추진계획』에 의거, 붙임 설계변경내역서에 대한 자체 설계변경전 사전심의위원회를 개최하여 그 결과에 따라 설계변경을 시행(계약금액 조정)하고자 함.

첨부 : 설계변경내역서(신규공종 포함) 1부. 끝.