함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(1정수장 응집·침전지 보수공사)

1. 우리 정수센터에서 시행중인 『암사아리수정수센터 1정수장 응집·침전지 보수공사』에 대하여 다음과 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 암사아리수정수센터 1정수장 응집·침전지 보수공사

나. 공사기간 : 2014. 5. 29 ~ 11. 24

다. 도 급 액 : 673,352,000원

라. 도 급 자 : 공항시설관리(주) 대표 임동만

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

바. 하자담보기간 : 준공검사일로부터 2년간

사. 설계변경 내역

구 분	당초금액	변경금액	증·감
도 급 비	673,352,000	657,756,000	감) 15,596,000

아. 설계변경 사유 : 시공물량 증·감 및 보험료 정산

2014.10.29. 감추산필 5번

붙  임 : 1) 설계변경 심의보고서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 합의서 1부.  끝.

주무관	강희권		주무관	변민용		정수시설과장	남효돈		소장	10/30 유성종
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	정수시설과-3198	(		)	접수		(		)
우	134-852	서울특별시 강동구 아리수로 131(암사3동)	/
전화	3146-5776	/전송	3146-5707	/	kkaann2@seoul.go.kr	/	대시민공개