문서번호	녹색에너지과-12832
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	신재생에너지팀장	녹색에너지과장	환경에너지기획관		기후환경본부장
이경택	임병욱	권민	윤영철		06/25 장혁재
협 조

한강변 신재생에너지 벨트 조성 용역 추진

2015. 6월

기후환경본부

(녹색에너지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	용역수행 과정에 관계 전문가 참여
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	에너지절약전문업체 등 활용
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

한강변 신재생에너지 벨트 조성 용역 추진

한강변을 따라 지역 특성에 맞는 태양광, 풍력 등 신재생에너지 벨트를 조성하여 ‘친환경 수도 서울’의 위상을 제고 하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 한강변 신재생에너지 보급으로「에너지 살림도시, 서울」구현에 기여

❍ 남·북단 도로에 신재생에너지 설치로 시민 공감형성 및 참여 확대 유도

❍ 공간·지역적 특성을 고려한 신재생에너지 설비 디자인으로 경관 개선

□ 권역별 태양광/열, 풍력, LED 등을 보급으로 신재생에너지 벨트 조성

❍ 에너지 생산·절약 사례로 「선유도 ‘에너지 자립 섬’」시범사업 추진 등

❍ 한강 중심인 지역을 기준으로 권역별(동·서·남·북) 중·장기 보급계획 수립

Ⅱ		사업개요

□ 사업대상 : 한강 서울시계 내

□ 사업기간 :´15년 7월 ~ ´16년 12월

□ 소요예산 : 2,015백만원  (´15년 15(용역비), ´16년 2,000(사업비))

❍ ´15년 : ‘신재생에너지 설치 검토체계 구축’ 사업비(일반운영비, 사무관리비)

❍ ´16년 : 신규 편성 또는 공공기관 신재생에너지 보급사업 포함

□ 추진방법

❍ 한강변 신재생에너지 벨트 조성 일반용역을 추진하여 사업계획수립 및 추진

※ 계약심사 업무처리 규칙 제4조 제2호(1억원 미만 일반용역 계약심사 제외)

Ⅲ		한강변 신재생에너지 벨트 조성 용역 개요

□ 용 역 명 : 한강변 신재생에너지 벨트 조성 방안

□ 과업기간 : 계약일로부터 90일

□ 계약방법 : 협상에 의한 계약

□ 소요예산 : 15백만원(부가세 포함)

❍ ‘신재생에너지 설치 검토체계 구축’ 사업비(일반운영비, 사무관리비)

□ 주요내용

❍ 한강본류, 인접 공원·지류천 신재생에너지 벨트 조성 중·장기 계획수립

❍ ‘광진교’, ‘서울 숲’ 시범사업 및 ‘선유도 에너지 자립 섬’ 조성 등

⇒ 효율적이고 상징성 있는 사업추진을 위해 중·장기 계획 일반용역 시행

□ 용역 추진방안

❍ 과업범위

- 공간적 범위 : 서울시계 내 한강 본류구간 도로, 교량 등 시설물과 한강 공원, 한강과 인접 한 연계 공원 및 지류천 합류지역 일대

□ 북측(마포구 상암동 1566~광진구 광장동 564), 남측(강서구 개화동 657~강동구 강일동 2-1)

- 시간적 범위 : 특정하지 않음

- 내용적 범위

□ 선유도 등 주요시설의 ‘에너지 자립 지역’ 조성을 위해 에너지 진단 실시

□ 한강 공원, 도로, 교량, 지류천(중랑천 등) 한강 인접지역을 연계하여 지역 특성에 맞는 신재생에너지 벨트 조성(안) 작성

□ 한강 중심 지역을 기준으로 권역별(동·서·남·북) 중·장기 보급(안) 수립

※ 유사․중복용역 여부 서울연구원, 정책연구관리시스템 등으로 자체 확인 점검

❍ 주요 연구내용

- 한강 본류 구간 신재생에너지 보급

	검토사례 1. 선유도 ‘에너지 자립 섬’ 조성
▸ 선유도 공원(11만㎡, 수생식물원, 카페나루 등 운영, 2002년 4월 개원) 시설 개선 병행 ▸ 태양광(150kW), 태양열(200㎡), ESS(500kW), LED 신규설치 및 노후 보일러 등을 고효율 설비로 교체 추진하여 ‘에너지 자립 섬’ 조성
<전망대 하이브리드 풍력 가로등 설치>		<태양열 온실>		<신재생에너지 사용 선유교 경관 조명>

	검토사례 2. 교량 등 다양한 공간 활용 신재생에너지 보급
▸ 이촌 한강공원 등 보행자 및 자전거 도로에 하이브리드 풍력 보안등 설치 ▸ 교량 등 다양한 공간 활용 태양광 보급(광진교 태양광 쉼터, 수상 태양광 등)
<하이브리드 풍력 보안등 설치>		<광진교 태양광 쉼터 조성>	<수상 태양광>

- 남·북단 유휴 공간 및 도로 시설물 활용 방안

	검토사례 3. 유휴 공간 및 도로 시설물 활용
▸ 방음벽 등 도로 시설물과 도로 구조물 등을 활용한 태양광 보급 ▸ 한강변에 인접한 상수도 취수시설 등 공공 시설물 활용 신재생에너지 보급
<방음벽 상단 활용 사례>		<두무개 다리(한남대교~동호대교, 약 1km)>	<자양취수장 태양광>

- 인접 지류천 및 공원 등과 연계 방안

	검토사례 4. 유휴 공간 및 도로 시설물 활용
▸ 고덕천, 중랑천 등 한강 지류천 연계 신재생에너지 테마 벨트화 추진 ▸ 한강변과 접근성이 양호한 인접 공원별 특화된 신재생에너지 설치 - 서울 숲(풍력), 월드컵공원(신재생에너지 랜드마크), 고덕천(에너지 테마존) 등
<서울 숲 - 풍력 체험교육시설 조성>		<월드컵공원 – 신재생에너지 랜드마크>		<고덕천 - 에너지 테마존>

❍ 사업추진 과정(착수·중간·최종보고회)에 관련분야 전문가 참여 사업추진 내실화

□ 추진일정

방침수립	⇨	과업내용 작성, 용역발주	⇨	협상에 의한 계약 체결	⇨	착수·중간 보고	⇨	최종보고 및 자체평가
[6.25(목)까지]		[6.30(화)까지]		[7.15(수)까지]]		[´15.7~8월중]		[´15.9월말 까지]

□ 활용계획

❍ ‘선유도’ 등 에너지 자립화, 신재생에너지 벨트 조성 기초자료 활용

❍ 한강변 지역 특성에 맞는 신재생에너지 벨트 중·장기 추진(안) 수립

❍ 신재생에너지 교육 프로그램 운영 및 공공부문 에너지 절약 모델 활용

Ⅳ		향후 추진일정

□ 발주 의뢰 및 계약 체결 :´15. 7. 15 까지

□ 일반용역 시행  :´15. 7 ~ 9월 까지

□ 일반용역 결과보고 및 정책수립 반영  :´15. 9월

붙임 : 유사·중복용역 자체 확인 점검표 1부. 끝.

(붙임자료)

유사․중복용역 자체 확인 점검표

검 색 웹 사 이 트	접 근 방 법	확인일자 및 확인내용
학술용역관리시스템	행정포털 행정업무 > 시정기획 > 학술용역 관리	- 확인일자 : 2015.6.22 - 유사․중복용역 확인 1) 있음 ( ) 2) 없음 (◯)
서울도서관	서울도서관 > 정보검색 > 서울시간행물	- 확인일자 : 2015.6.22 - 유사․중복용역 확인 1) 있음 ( ) 2) 없음 (◯)
프 리 즘 (정책연구관리시스템)	www.prism.go.kr > 프리즘연구검색	- 확인일자 : 2015.6.22 - 유사․중복용역 확인 1) 있음 ( ) 2) 없음 (◯)
서울연구원	www.sdi.re.kr > 연구보고서	- 확인일자 : 2015.6.22 - 유사․중복용역 확인 1) 있음 ( ) 2) 없음 (◯)
국 회 도 서 관	www.nanet.go.kr > 전자도서관 > 소장자료검색	- 확인일자 : 2015.6.22 - 유사․중복용역 확인 1) 있음 ( ) 2) 없음 (◯)

확인자 : 직  공업6급, 성명 이경택