투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(지하철916공구 건설공사 폐기물처리용역)

1. 우리본부에서 시행중인 『지하철9호선2단계 916공구 건설공사 폐기물처리용역』에 대하여 물량변경으로 인한 계약금액을 아래와 같이 조정하여 시행코자 변경계약을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 지하철 9호선2단계 916공구 건설공사 폐기물처리용역

나. 계 약 자 : ㈜동보이앤시  대표 김지환

다. 용역개요 : 지하철9호선 2단계 916공구 건설공사 폐기물처리

라. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업,

도시철도9호선2단계건설, 시설비및부대비, 시설비

세입세출외 현금(코엑스몰연결출입구 수탁공사비)-12,000,000원

마. 설계변경 내역                                        (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총괄 (5회)	계약금액	620,000,000	632,000,000	증)12,000,000
	기 간	’08.11.13.~ ’15.09.30.	’08.11.13~ ’15.10.31.	1개월 연장
5 차 (3회)	계약금액	194,249,690	206,249,690	증)12,000,000
	기 간	’14.04.02.~ ’15.09.30.	’14.04.02.~ ’15.10.31.	1개월 연장

바. 변경사유 : 지하철916공구 폐기물 배출계획 변경

따로붙임 : 1) 설계변경 검토보고서 1부.

2) 변경설계서(총괄5회, 5차3회) 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	이경훈		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	09/30 김진팔
협조자	주무관	유원하		경리과장	代정해민		기획예산과장	안순봉
시행	도시철도토목부-12385	(		)	접수		(		)
우	04520	중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 9층(도시철도토목부)	/
전화	02-772-7224	/전송	02-772-7306	/	lkh00n@seoul.go.kr	/	대시민공개