“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
		서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(야구테마거리 조성사업 실시설계 용역)

우리시에서 수행중인 「야구테마거리 조성 사업 실시설계 용역」에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 야구테마거리 조성 사업 실시설계 용역

나. 계약자 : ㈜이산, 주식회사 조경그룹이작

다. 준공기한 연기내역

- 당초 : 2015. 9.30.

- 변경 : 2015.11.30.

라. 귀책사유 : 서울특별시

첨부 : 1) 준공기한 연기 보고. 1부.

2) 과업기간 조정 요청 문서. 1부.

3) 준공기한 연기의뢰서. 1부. 끝.

							체육정책과장
주무관							이재익			주무관					김창기					체육정책과장					09/30 이형삼
협조자
시행			체육정책과-3304									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15															/
전화		02-2133-2694						/전송			02-2133-1064					/													/	대시민공개