투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	변경계약의뢰 (지하철916공구 건설공사 - 총괄6회,9차3회,10차1회)

1. 우리부에서 시행하고 있는 『지하철9호선2단계 916공구 건설공사』와 관련하여 감리사로부터 제출된 설계변경(총괄6회, 9차3회, 10차1회)을 아래와 같이 시행하고자, 변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 관리번호 : 제0*******00호

나. 공 사 명 : 서울지하철9호선 2단계 916공구 건설공사

다. 공사기간 : 총괄 2008.06.02. ~2015.09.30.

9차) 2014.09.19. ~2015.09.30.

10차) 2015.03.19. ~2015.09.30.

라. 도 급 자 : 현대산업개발(주) 김재식 외 1개사

마. 감 리 사 : ㈜유신 외 4개사

바. 계약변경 내역

구분	계 약 금 액(원)		비 고
	당 초	변 경
총괄 (5회)	159,609,860,000	159,748,000,000	증) 138,140,000
9차 (3회)	14,101,860,000	14,574,800,000	시설비:증472,940,000
10차 (1회)	5,500,000,000	5,165,200,000	현 금:감334,800,000

사. 변경사유 : 계약물량 증감 및 보험료 정산에 따른 계약금액 조정

아. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업,

도시철도9호선2단계건설, 시설비및부대비, 시설비

세입세출외 현금(한국무역협회 위탁공사)

붙 임 : 1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 책임감리원 검토의견서 1부.

3. 변경내역서(총괄6회, 9차3회, 10차1회) 각1부. 끝.

	도시철도토목부장
주무관	이경훈		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	09/30 김진팔
협조자	주무관	유원하
시행	도시철도토목부-12423	(		)	접수		(		)
우	04520	중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 9층(도시철도토목부)	/
전화	02-772-7224	/전송	02-772-7306	/	lkh00n@seoul.go.kr	/	부분공개