문서번호	시설보수과-3721
결재일자	2015.10.1.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
정규용		이용재	10/01 代송재우
협 조

설계변경(정산)보고

【노들남고가 등7개시설물 정밀점검 용역】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

남부도로사업소

(시설보수과)

설계변경(정산) 보고

【노들남고가 등7개시설물 정밀점검용역】

우리 사업소에서 시행중인 “노들남고가 등7개시설물 정밀점검용역”의 설계변경(정산) 사항에 대한 보고임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 노들남고가 등7개시설물 정밀점검용역

○ 용역기간 : 2015.06.08. ~ 2015.10.05.

○ 계약금액 : 금114,500,000원

○ 용역규모 : 정밀점검 1식(노들남고가,대방지하차도,도림천2복개,도림천3

복개,시흥천2복개,이수교,신림1교)

○ 용 역 사 : ㈜청운구조안전연구원 대표 김선신

□ 보고내용

○ 자문비 실비용 정산 : 자문위원 당초6명→변경3명

○ 정산내용                                                  (단위 : 원)

구분	계약금액	정산금액	증․감	비고
자문비	600,000	300,000	감 300,000	부가세 제외

○ 설계변경(정산) 금액                                       (단위 : 원)

구분	당초금액	변경금액	증․감	비고
도급비	114,500,000	114,170,000	감 330,000	부가세 포함

□ 조치의견

○ 위와 같이 자문비용에 대해 설계변경(정산) 처리하고자 합니다.

붙 임 : 설계변경내역서 1부.  끝.