문서번호	급수운영과-25768
결재일자	2015.10.1.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
최호림	김태형	10/01 최명익

공사실정보고(동일로 송배수관정비공사)

2015.10.

동부수도사업소

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

동일로 송배수관정비공사

공사실정보고

우리과에서 시행하는『동일로 송배수관정비공사』와 관련하여 시설관리공단 으로부터 공사구간 내 하수박스 하월부 확인굴착과 관련하여 공사실정 보고가 접수되어 아래와 같이 보고합니다.

※ 관련근거 : 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-15467호(2015.09.25.)

『실정보고서 제출(하수박스 하월부 확인굴착)』

□ 공사현황

○ 공 사 명 : ********************

○ 공사개요 : **********************************************

○ 공사기간 : *************************

○ 도 급 비 : ***********

○ 시 공 자 : **************

□ 실정보고

○ 현황 및 문제점

- 1구간 중곡동190-1호 앞 하수박스 하월예정부 현장 확인결과 박스 전·후로    통신관로 및 하수도(φ1000mm)가 추가로 매설되어 하수박스 하부 하월가능    여부(강관배관) 및 지장물 확인 후 용수여부에 따라 가시설 및 차수공사     판단을 위해 하수박스 하월전 확인굴착이 요구되고 있는 실정임.

○ 검토의견

- 위와같은 사항으로 하수박스 하월전 확인굴착을 시행하여 지장물 및 토질         상태를 판단하여 강관부설(하월)을 시행코자 함.

· 개략공사비 : **********

□ 실정보고 검토

○ 시설관리공단 공사감독2처-12487호(2015.08.18.)로 기 실정보고된 하수박스        하월 공사구간에 대하여 기 확인굴착을 실시하였으나,

○ 확인굴착 시 하수박스에 대한 규격(B=6.0m,H=3.7m)만을 확인한 상태임.

○ 하수박스 하월구간 주변의 맨홀 확인결과 박스 주변으로 통신관로 및 하수관        (φ1000mm)이 추가로 발견되어 정밀하게 확인이 필요함.

○ 또한, 하수박스 하단부의 용수여부를 면밀히 확인하여 가시설 및 차수공사        실시여부 판단이 필요함.

□ 검토결과

○ 하수BOX 하월부 확인굴착을 실시하여 기 확인하지 못한 통신관로 및 하수도를 면밀히 검토하여 강관 자재선정 및 시공계획 등을 세워 하월공사를 실시함이 타당함.

○ 확인굴착 실시로 하수박스나 하수도의 누수 및 지하수의 유입 등 용수여부를 판단하여 가시설 설치 및 차수공사 실시여부를 판단하여 안전사고를 예방함이 타당함.

○ 하수BOX 하월부 확인굴착에 따른 변경물량은 향후 설계변경에 반영하여 정산처리코자 함.

□ 조치계획

○ 검토결과 사항을 시설관리공단에 통보하여 송배수관정비공사 관리감독에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 1. 현장실정보고서 제출공문 및 실정보고서 각1부.

2. 시공사 제출공문 및 실정보고서 각1부.  끝.