문서번호	물재생과-6428
결재일자	2015.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
최승룡		강병수	10/01 김동기
협조

『차집관로 시설물 유지보수공사』

실정보고서 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.10.

중랑물재생센터

(물재생과)

『차집관로 시설물 유지보수공사』

실정보고서 검토보고

우리센터에서 추진중인 『차집관로 시설물 유지보수공사』의 도급자로 부터 실정보고서가 접수되어 이에 대한 검토 보고임

1		사업개요

□ 사 업 명 : 2015년 차집관로 시설물 유지보수공사(연간단가)

□ 사업기간 : ‘15.05.27 ~ ’15.12.31

□ 사 업 비 : 1,492,792천원

□ 도 급 자 : ㈜치산치수 대표 박흥자

□ 공사내용

- 콘크리트 타설 80㎥, 맨홀보수 45개소

- PE관로부설(D250~600mm) L=70m

- 비굴착 보수(D450~1,200mm) L=2,400m

2		실정보고 내용

□ 중랑천 우안 차집관로 맨홀뚜껑 및 받침교체

- 중랑천 우안(장안동 현대아파트 116동 앞)

• 당초 : 1.4m × 1.4m 맨홀뚜껑 및 받침 교체

• 변경 : 1.4m × 1.4m 맨홀뚜껑 및 받침 교체(높이조정 50cm 인상)

- 중랑천 우안(장안동 현대아파트 115동 앞)

• 당초 : 1.4m × 1.4m 맨홀뚜껑 및 받침 교체

• 변경 : 1.4m × 1.4m 맨홀뚜껑 및 받침 교체(높이조정 50cm 인상)

3		검토결과 및 조치의견

□ 원활한 차집관로 유지관리를 위하여 맨홀 높이 조정이 필요함.

□ 맨홀 높이조정을 도급자로 하여금 시공토록 하고 추후 설계변경에 반영 정산      처리코자 함.(1,888천원 증)

붙임 : 실정보고 내역서 및 현황사진 1부.    끝.