함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 심의위원회 개최(노원고교~온수골사거리간 송배수관 정비공사)

1. 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-15432(2015.09.24.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행하고 시설관리공단에서 감독중인 송배수관 정비공사에 대하여 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 노원고교~온수골사거리간 송배수관 정비공사

나. 공사기간 : 2015. 5. 22. ~ 2015. 11. 18.

다. 도 급 액 : 284,075,850원

라. 공사개요 : D=100~600mm, L=583m

마. 도 급 자 : 동신공영(주) 대표 안근모

바. 감 독 자 : 시설관리공단 공사감독2처 김희웅

사. 설계변경 사유  - 신규공정 발생에 따른 변경
- 기타 현장여건에 따른 물량변경

아. 공사비 변경

(단위 : 원)

구 분	금 액		증,감
	당 초	변 경
총 공사비	957,725,850	957,725,850	0
도 급 비	284,075,850	262,400,000	-21,675,850
관급자재비	200,000,000	270,000,000	70,000,000
도로복구비	473,650,000	425,325,850	-48,324,150
관로 부설	D=100~600mm, L=583m	D=100~600mm, L=546m	L=-37m

자. 심의회 개최

- 심의일정 : 2015. 10. 2.(10:00)

- 장    소 : 급수운영과

- 심의위원 : 위원장 급수운영과장

위 원 : 시설7급 김종필, 시설7급 강대유

시설7급 유광창, 시설7급 이한수

- 심의내용 : 신규공종, 계약물량 증감에 따른 설계변경 적정 여부

기타 제반규정 적정준수여부.

붙 임 : 1) 설계변경 내역서 1부.

2) 설계변경 심의요구서 및 사유서 1부. 끝.

주무관	정기성		지방시설사무관대우	이승완		급수운영과장	10/01 김수영
협조자	주무관	김종필토		주무관	이한수		주무관	유광창
주무관	강대유
시행	급수운영과-18870	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3367	/전송	02)3146-3389	/		/	부분공개