문서번호	보행자전거과-13002
결재일자	2015.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	공공자전거팀장	보행자전거과장
이무영	최연호	10/01 이방일

4대문안 공공자전거

대여소 전기인입공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10

4대문안 공공자전거

대여소 전기인입공사 계획

10월 확대 운영지역인 4대문안 지역 공공자전거 대여소의 통신장비 함체 전기인입공사를 시행하여 운영에 만전을 기하고자 함

□ 대여소 선정 결과

○ 4대문안 : 45개소 / 거치대 447개소 / 자전거 268대

지역	대여소	거치대	자전거
4대문	45개소	447	268

□ 전기공급 협의 결과

○ 한국전력에서 관리하는 전기를 직접 사용(49%)여 안정적 운영

구 분	가판대	공중전화기	관공서	경찰초소	민간건물	한전	계
4대문	13	10	6	3	4	9	45
비율	29%	22%	13%	7%	9%	20%	100%

□ 전기공사 계획

○ 공 사 명 : 확대지역(4대문안) 공공자전거 대여소 전기인입공사

○ 공사기간 : 2015. 10.2 ∼ 10.8 (1주간)

○ 공사내용 : 한전에서 공급하는 인근 전기공급시설로부터 대여소 인근
설치된 통신장비 함체까지의 전기인입공사

- 대여소 운영을 위해 자전거 단말기와 무선통신을 연결해주는 무선 엑세스포인트(Wireless Access Point : 약자 AP) 장치를 대여소 인근에 설치

- 설치되는 AP에 전기공급을 위하여 대여소별 전기공급시설에서 AP까지 전기인입공사 필요

○ 소요예산 : 15,136,000원

※ 한국전력 수전 신청(이전비) 4,204,200원 별도

○ 계약방법 : 소액수의계약

○ 계약업체 : 광원전설㈜ 대표 : 김영선 (서울시 서대문구 북가좌동 322-4)

○ 근    거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항5호, 30조 제1항2호

○ 사    유 : 계약금액 소액이며, 전기분야 경험이 있는 업체와 계약을 체결함이 본 과업목적을 달성하기에 효율적이라 판단됨

※ ’15.10.15(목) 시범운영 개시일에 맞추기 위해서는 확대지역
긴급 공사 불가피

‣ 공사대상 물량 조사 확정(15.10.1)에 의해 발주함에 따라 분할 수의계약 긴급공사 불가피

- 공개경쟁 입찰시 대외 공표한 10.15 전면 오픈 불가

□ 예산조치

○ 예산과목 : 자전거이용시설 확충 및 관리, 공공자전거운영, 시설비(401-01)

○ 소요예산 : 15,136천원

※ 한국전력 수전신청 이전비는 별도 신청 및 부과금에 따라 공공운영비로 집행(전기공사업체에서 대행 가능시 대행 시행)

□ 추진일정

○ ’15. 10. 5(월)한   공사계약

○ ’15. 10. 8(금)한   전기인입공사 완료

○ ’15. 10.14(수)한   대여소 통신 작동여부 점검 완료

붙임  1. 공사내역서 1부.

2. 사업자등록증 1부

3. 전기공사업등록증 1부. 끝.