문서번호	설비부-12053
결재일자	2015.10.1.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
박병환	김영수	10/01 박기형

『서울시민 가족자연체험시설 전기공사(제천)』

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『서울시민 가족자연체험시설 전기공사(제천)』

설계변경 검토 보고

『서울시민 가족자연체험시설 전기공사』와 관련 교육정책담당관으로 부터 추가공사 요청이 있어 아래와 같이 설계변경 검토 보고 드림.

관련근거

○ 2015 서울시민 가족자연체험시설 조성사업 추가공사 요청

------------------------- 교육정책담당관-11830(’15.8.28.)호

공사개요

○ 공 사 명 : 서울시민 가족자연체험시설 전기공사(제천)

○ 위    치 : 충북 제천시 송학면 송한리 543번지

○ 규    모

- 시설부지 6,754㎡, 지상2층, 연면적810㎡(송한분교)

- 보안등주(5mx1등용, LED30W)7본, 방송설비 1식, 전기공사 1식

○ 도 급 자 : 토우건설㈜  대표 김사석

○ 도 급 비 : 58,044천원

○ 공사기간 : 2015.07.13. ~ 2015.10.30.

설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 주관부서 추가공사 요청에 따른 물량 증·감으로 변경

○ 설계변경 내용

구 분	주요 설계변경 내용	비 고
옥외 전기설비공사	- 옥외 전력간선 배관, 배선 등 변경
전열설비공사	관리실 추가로 배관, 배선 등 변경

구 분	주요 설계변경 내용	비 고
CCTV설비공사	- CCTV카메라 4대, DVR 1대 신설 동축케이블, 전원선, 배관 등 신설
보험료 정산	건강·연금·노인장기요양보험료 등 변경

도급비 변경현황

[단위 : 천원]

구 분	변 경 현 황		증·감	비고
	당 초	변 경
도 급 비	58,044	64,768	증6,724

※ 공사기간은 변경없음

예산과목

○ 평생교육정책관, 교육정책담당관, 폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성운영, 시설비

보고자 검토의견

○ 추가 공사분(CCTV, 관리실, 교실 등)을 설계변경 후 건설총괄부에 재

계약 의뢰 코자 합니다.

붙 임 :  1. 관련공문 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.