문서번호	토목부-20532
결재일자	2015.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
심규진		서관석	10/01 노우성
협조	주무관		오열상
	주무관		장기철

관급자재 수급방법 변경에 따른 계약금액 조정 검토보고

《 월드컵대교 건설공사 》

2015.10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

관급자재 수급방법 변경에 따른 계약금액 조정 검토보고

공사개요

❍ 공사규모 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1,980m

❍ 공사기간 : 2010. 3.22. ~ 2020. 8.31.

❍ 공 사 비 : 176,826백만원

❍ 시 공 사 : 삼성물산㈜ 외 2개사

❍ 감 리 단 : ㈜포스코엔지니어링 외 1개사

보고내용

❍ 검토배경 : 조달청 품목 외 특수규격 레미콘에 대한 대체사용(관급→사급)  변경 승인(2015. 2.13.)에 따라 금번 레미콘의 계약금액 조정이 필요한 실정임.

❍ 관련근거 : 토목부-3066호(2015. 2.13.) - 관급자재 수급방법 변경 검토보고

「공사계약일반조건」제19조의6, 제23조

월드컵(감리) 2015-401호(2015. 9.21.)

❍ 공사비 조정 내역

(단위:천원)
구 분	규 격	단위	당 초		변 경		증 감		비 고
			수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
1.도급비	19-50-150	㎥	-	-	3,605	352,930	3,605	352,930
2.관급비	19-50-150	㎥	3,605	388,078			-3,605	-388,078
합				388,078		352,930		-35,148	단가하락으로 인한 금액 변경(감)

조치계획

❍ 관급자재 수급방법 변경에 따른 계약금액 조정에 대한 실정보고 내용을 검토한 바, 타당하기에 승인하고 향후 설계변경 시 반영하여 처리코자 함.  끝.