문서번호	의정담당관-10239
결재일자	2015.10.2.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관		시의회사무처장
김정수	이문주	정광현		10/02 한문철
협 조
	총무팀장		윤순용

- 본관 3층 바닥 보강 및 칸막이벽 철거 등 -  환경개선 공사시행 계획

2015. 10.

의 회 사 무 처

(의정담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

- 본관 3층 바닥 보강 및 칸막이벽 철거 등 -

환경개선 공사시행 계획

본관 3층 바닥 적재하중 증가로 슬래브 구조물 내력을 보강(2층 천정)하여 구조물 안전성을 확보하고 사무실 재배치 및 환경개선을 위해 칸막이벽(조적벽) 철거 및 바닥 타일 공사 등을 시행하여 업무 환경개선에 만전을 기하고자 함

1		정밀안전진단 실시

□ 안전진단 개요

○ 일    시 : 2015. 8. 28.(금) ~ 수시 점검

○ 장    소 : 시의회 본관 3층 영상미디어팀 사무실

○ 현    황

시 설 명	본 관		비 고
	면 적	도입장비
영상미디어 사무실	3.3*13=약42.9㎡(약13평)	약 13.7톤	사무실벽체 철거

○ 진단업체 : 사단법인 한국건설안전협회

○ 소요예산 : 약 3백 3십만원

○ 구조검토 결과

- 슬래브 : 내력보강 필요, - 조적벽체 : 철거 가능

2		주요 공사 계획

□ 본관 3층 칸막이벽 철거 및 바닥 타일 공사

○ 벽체 철거 및 마감 처리

- 칸막이 벽체 5개소 철거 및 마감처리(영상미디어팀 요구사항)

○ ELEV 옆 벽체 보수

- 벽체 균열 부분 보수(정밀진단 지적)

□ 본관 2층 영상미디어팀 천정 보강공사

○ 철골보강 및 천정 텍스 마감

- 철골 보강(1.05ton) 및 텍스마감(66㎡)(정밀진단 지적)

3		공사 시행

□ 시행시기 : 2015년 10월 중

□ 공 사 비 : 약 19,800천원

□ 시행방법 : 수의계약

○ 업  체 : 한미지오텍건설㈜

○ 주  소 : 서초구 마방로 2길 69, 201호(양재동)

○ 사  유

- 본 공사는 공사금액이 수의계약 범위 내 소액이고,  보수·보강공사 등 시공능력이 있는 전문업체 선정

- 서울특별시 정례회(2015.11.10. ~ 12.21.) 이전 공사 착공 및 완료하여 과업을 달성하고자 함

□ 협조사항

○ 사무실 이전 및 배치 관련 : 의정담당관(총무팀)

○ 기계, 전기, 통신 관련 : 의정담당관(시설관리팀)

○ 컴퓨터 재설치 관련 : 의사담당관(의정정보화팀)

□ 향후 추진계획

○ 2015. 10. 06. ~     영상미디어 사무실 이전 배치(부속동 4층)

○ 2015. 10. 13. ~     공사계약 및 착공(약 10일)

○ 2015. 10. 23. ~     공사준공

○ 2015. 10. 26. ~     영상미디어 사무실 재배치 완료(본관 3층, 2층). 끝.