문서번호	시설관리과-18625
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
양봉우	송종범	10/02 남정열
협 조

현장실정보고에 따른 노후관정비 계획 보고

“2015년 천호1동외 17개동 상수도공사” 업무수행 중 현장실정보고서가 제출되어 검토후  조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 10. 02.

보고자 : 지방시설주사보 양봉우

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 천호1동외 17개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 지시번호 : 개량-95

○ 작업기간 : 2015.09.16 ~ 2015.09.25

○ 작업위치 : 강동구 천호동 227-11

□ 보고내용

○ 관련근거 : 현장실정보고서 이준015-35(’15.10.02) 「급수공사 시행 관련 보고」

○ 현장점검 확인내용

- 폐전 신청한 천호동 227-11번지 기존인입관 분기점폐쇄를 위하여 굴착 확인한바, 배수본관이 PVC D=50mm로 개량 대상임

□ 조치의견

○ 분기점 폐쇄시 노후관으로 확인된 배수본관(PVC D=50mm)에 대하여 개량 작업지시하여 노후관 정비에 만전을 기하고자 함

○ 공사개요 : D=50mm, L=20m

붙 임 : 현장실정보고서 1부.  끝.